함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경에 따른 계약 의뢰(강동구 시설물공사)

우리사업소에서 시행중인 『2016년 강동구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)』와 관련하여 설계변경(1차) 및 차수별 금액변경을 시행하고, 아래와 같이 계약의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 강동구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : 당초-밸브교체 102개소 등

변경-밸브교체 102개소 등

다. 공사기간 : 2016.6.27. ~ 2016.12.31.(총부기기간:2016.6.27.~2017.6.30.)

라. 계약상대자 : 에이치에프건설㈜ 대표 황행묵

마. 변경내용 : 신규공종 및 계약물량 증․감 발생                   (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
도 급 비	406,785,080	406,785,080	금액변경 없음

바. 차수별 부기금액                                           (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
총부기금액	406,785,080	406,785,080	총부기금액 변경없음
1차부기금액	300,000000	231,308,000	(감) 68,692,000
2차부기금액	106,785,080	175,477,080	(증) 68,692,000

사. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브 정비)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(배수지 환경정비)

아. 설계변경 및 차수별 금액변경 사유

- 신규공종 및 계약물량 증․감발생에 따른 차수별 금액변경

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 관련 서류 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김주경		시설관리과장	전결 12/23 代김효수
협조자
시행	시설관리과-26463	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/
전화	3146-5207	/전송	3146-5239	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개