보 고 서
			담당	팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호	도로관리처-9086
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2016.12.14.
공개여부	공개
제 목	공사 설계변경 보고(2016년 정릉천고가교 교면정비공사)

Ⅰ	공사현황

가. 공 사 명 : 2016년 정릉천고가교 교면정비공사

나. 공사기간 : 2016. 8. 24 ~  2016. 12. 31

다. 총공사비 : 4,326백만원 (도급 3,182, 관급 1,005, 폐기물 139)

라. 공사개요 : 노면절삭 및 덧씌우기 466a(교면방수408a, 매스틱58a)

상판보수 10.3a, 기타 부대공 1식

마. 도 급 자 : 백산이앤씨(주) 대표 김인자

Ⅱ	설계변경 현황

가. 설계변경 사유

1) 공사 실정보고 및 공사구간 실측에 따른 시공물량 반영

○ 신규공정반영 : 도로관리처-8904(‘16.12.09)호

- 주입줄눈 설치(t=45mm) : 증) 2,142m

- 공사구간내 교통단속장비 복구 : 증) 1개소

○ 교면방수 관리시험 수수료 반영 : 도로관리처-3600(’16.6.7)

○ 공사구간 실측에 따른 시공물량 반영

- 아스팔트 콘크리트 포장 : 당초) 466a → 변경) 478a   증) 12a

- 교면방수 : 당초) 408a → 변경) 420a                 증) 12a

- 열화부제거 및 단면보수 : 당초) 10.3a → 변경) 3a     감) 7.3a

2) 기타 미사용 보험료 등 제경비 정산

3) 설계변경심의 의견 반영 : 총무처-45430(‘16.12.13)호

나. 설계변경 증·감 내용

1) 주요 시공수량 증감 : 총괄수량집계표 참조

공 종	단위	당초	변경	비 고
아스팔트콘크리트포장	㎡	46,674	47,826	(증)	1,152
구스아스팔트포장	㎡	5,827	5,806	(감)	21
단면보수	a	10.30	3.00	(감)	7.30
교면방수	㎡	40,847	42,067	(증)	1,220
주입줄눈설치	m	8,555	6,403	(감)	2,152
주입줄눈설치(단면보수구간)	m	-	2,143	(증)	2,143

2) 관급자재 수량 증감 : 도로관리처-8904(‘16.12.09)

구 분	단위	당초	변경	비 고
개질SMA	톤	8,934	9,613	(증)	679

3) 폐기물처리 수량 증감 : 도로관리처-8952(‘16.12.12)

구 분	단위	당초	변경	비 고
계		8,845	10,285	(증)	1,440
폐아스콘 운반및처리	톤	7,677	7,866	(증)	189
혼합건설폐기물 운반및처리	톤	1,168	2,419	(증)	1,251

Ⅲ	공사비 변경

가. 공사비 증감현황                                                (단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감	비고
총 공 사 비	4,323,802,090	4,434,358,567	증) 111,056,477
도 급 비	3,181,928,840	3,145,890,000	감) 36,038,840
관 급 비	1,004,996,450	1,081,572,567	증) 76,576,117
폐기물처리비	136,876,800	206,896,000	증) 70,519,200

나. 증액비용(111백만원) 조치계획 : 16년 정릉천고가교 교면정비공사 잔여예산 사용

구 분	배정예산	계약금액	잔여예산 (낙찰차액포함)	비고
사업비(원)	5,043,291,000	4,323,802,090	719,488,910

Ⅳ	행정사항

○ 상기와 같이 설계변경을 시행하고 총무처에 변경계약 의뢰.  끝.