보 고 서
			담당	팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호	도로관리처-9170
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2016.12.15.
공개여부	공개
제 목	공사 설계변경(정산) 보고 (도로표지)

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2016년 자동차전용도로 도로(교통안전)표지 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016. 02. 19 ~ 2016. 12. 31

다. 공사개요 : 도로표지 1식, 교통안전표지 1식

라. 도 급 액 : 175,750,000원

마. 도 급 자 : (주)한판유리 대표 이성우

2. 설계변경 사유

가. 현장 실정보고에 따른 계약수량 증•감 및 신규 공종 발생

① 조명식표지 설치관련 신규공종 발생

＊관련근거 : 조명식 도로표지 시범설치 시행 계획

『도로관리처-4908(2016.7.22, 본부장방침)호』

자동차전용도로 조명식표지 설치 계획

『도로관리처-6955(2016.10.6)호』

② 작업지시(파손시설 및 노후시설) 실 시공 수량 반영에 따른 증•감 발생

나. 공종별 작업수량 변경에 따른 계약수량 조정

: 반사지정비(고휘도) 등 130개 공종.

다. 각종 보험료 실비 정산 ※ 설계변경 심의완료

3. 설계변경 금액 및 주요공종 수량 증·감 내역

가. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공사비		175,750,000	189,800,000	증) 14,050,000
도급비	공급가액	159,772,728	172,545,455	증) 12,772,727
	부가가치세	15,977,272	17,254,545	증) 1,277,273
	계	175,750,000	189,800,000	증) 14,050,000

나. 주요 공종별 수량 증·감 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 ․ 감
반사지정비	고휘도, 고소작업	㎡	40	67	증) 27
조명식도로표지판교체,야간	편지식,복주식,문형식	개소	0	36	증) 36
중형삼각변교체	1350, 고휘도반사지	매	108	130	증) 22
중형원형신설	Ø900	매	46	105	증) 59

4. 행정사항

상기 사항과 같이 설계변경(정산)을 시행하고 총무처에 변경계약 의뢰코자 함.

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부.  끝.