보 고 서
			대리	팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호	도로관리처-9171
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2016.12.15.
공개여부	공개
제 목	설계변경(정산) 보고 - 2016년 아차산교 교면정비공사

1. 공사 설계변경

Ⅰ	공사현황

가. 공 사 명 : 2016년 아차산교 교면정비공사

나. 공사기간 : 2016. 7. 19 ~  2016. 12. 31

다. 총공사비 : 2,492백만원(도급비 1,935백만원, 관급비 491백만원, 폐기물처리비 66백만원)

라. 공사개요 : 교면방수 및 포장 236a, 상판보수 20.4a, 기타 부대공 1식

마. 도 급 자 : 고황건설(주) 대표 우중근

Ⅱ	공사 설계변경 현황

가. 설계변경 사유

- 공사 실정보고 및 추가공사에 따른 시공물량 변경

나. 설계변경 내용

1) 품질시험 수수료 반영

▷ 관련근거 : 도로관리처-3600(2016.06.07)

▷ 내    용 : 교면방수 및 아스콘 관리시험에 따른 수수료 반영

▷ 주요수량 : 아스콘 시험 13회, 방수 시험 3회(공법별 관리시험 1회 시행)

2) 노후포장구간 추가정비

▷ 관련근거 : 도로관리처-8160(2016.11.16)

▷ 내    용 : 노후포장 구간 추가정비 시행 → Ramp-C구간(A1~P10)

▷ 주요수량 : L=175m, A=11.4a

3) 차선도색공사 공사시행방법 변경(주간→야간)

▷ 관련근거 : 도로관리처-8224(2016.11.17)

▷ 내    용 : 현장여건에 따른 차선도색 공사의 공사시행 방법 변경(주간→야간)

▷ 주요수량 : 차선도색(야간) 1식

4) 기타 실시공 수량 정산, 보험료 및 제경비 정산

▷ 주요 변경수량 :

- 상판보수공 20.4a → 2.13a (감) 18.27a

- 유공관 설치 2,700m → 2,019m (감) 681m

- 주입줄눈 설치 5,400m → 3,519m (감) 1,881m

Ⅲ	공사비 변경

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감	비고
총 공 사 비	2,492,101,421	2,241,124,660	감) -250,976,761
도 급 비	1,934,866,351	1,660,439,000	감) -274,427,351
관 급 비	490,871,070	502,685,660	증) 11,814,590
폐기물처리비	66,364,000	78,000,000	증) 11,636,000

2. 용역 설계변경

Ⅰ	용역현황

가. 용 역 명 : 2016년 아차산교 교면정비공사 폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2016. 7. 19 ~ 2016. 12. 31

다. 용 역 비 : 66,364,000원

라. 용역개요 : 폐콘크리트 179ton, 폐아스콘 3,882ton, 혼합폐기물 555ton

마. 도 급 자 : 우성개발(주) 대표 윤훈식, (주)도성환경개발 대표 윤훈철

Ⅱ	용역 설계변경 현황

가. 설계변경 사유

○ 노면절삭이 곤란한 구조물 측면부 및 단차완화구간 혼합폐기물 수량 변경(추가) 발생

▷ 관련근거 : 도로관리처-7500(2016.10.25)

○ 추가공사(Ramp-C) 시행에 따른 폐기물 수량 변경

▷ 관련근거 : 도로관리처-8160(2016.11.16)

나. 수량변경 현황

구 분	수 량(ton)		증·감	비고
	당 초	변 경
폐콘크리트운반 및 처리	179	15	감) 164
폐아스콘운반 및 처리	3,882	3,685	감) 197
혼합폐기물운반 및 처리	555	860	증) 305

Ⅲ	용역비 변경

(단위 : 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감	비고
용 역 비	66,364,000	78,000,000	증) 11,636,000

3. 행정사항

- 상기와 같이 설계변경을 시행하고 총무처에 변경계약 의뢰.  끝.