보 고 서
			담당	팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호	도로관리처-9198
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2016.12.16.
공개여부	공개
제 목	설계 변경(최종) 보고

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2016년 자동차전용도로 도로부속물 정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2016. 02. 18 ~ 2016. 12. 31

다. 도급금액 : 1,336,978,000원

라. 공사개요 : 파손시설정비1식, 노후시설정비1식, 일상유지보수1식,

도로안전시설정비 1식, 옹벽 절개지 보수보강 1식, 기타 1식

마. 도 급 자 : 영동건설(주)  대표 손 병 회

2. 보 고 내 용

가. 주요 설계 변경 사유

◎ 2016년 자동차 전용도로 하반기 예산 운용 계획에 따른 계약 금액 증액

- 관련근거 : 2016년 제2차 하반기 예산 운용계획[도로관리처-7897(2016.11.08.)]

◎  현장 보고에 따른 신규 공종(27종) 발생

- 홍지문터널 갱구부외 1개소 급경사지 점검로 설치에 따른 신규공종 발생

＊관련근거 : 자동차 전용도로 급경사지 점검로 설치 계획 보고(도로관리처-8650)

- 내부순환로 길음 램프 방음시설 정비 따른 신규공종 발생

＊관련근거 : 내부순환로 길음 램프 방음시설  정비 계획 보고(도로관리처-8562)

- 방음시설 안전 점검 관련 긴급 보수에 따른 신규공종 발생

＊관련근거 : 방음시설 안전 점검 관련 보수사항 검토 보고(도로관리처-8386)

- 강변북로 망원 초록길 구간 교통안전시설 개선에 따른 신규공종 발생

＊관련근거 : 강변북로 망원 초록길 구간 교통안전 시설 개선 설치 계획 보고(도로관리처-7196)

◎ 현장 보고에 따른 계약수량 증·감(233종)

- 홍지문 터널 교통사고 다발구간 개선에 따른 계약 수량 증·감

＊관련근거 : 내부순환로 홍지문 터널 교통사고 다발구간 개선 계획(도로관리처-8928)

- 양재대로 배수시설 정비에 따른 계약 수량 증·감

＊관련근거 : 양재대로 배수시설 점검 및 정비 계획 보고(도로관리처-7598)

- 자동차 전용도로 구조물 구간 신축이음장치 청소에 따른 계약 수량 증·감

＊관련근거 : 구조물 구간 신축이음장치 청소 계획 보고(도로관리처-7960)

- 자동차전용도로 소음감쇠기 정비에 따른 계약 수량 증·감

＊관련근거 : 자동차전용도로 소음감쇠기 현장점검 결과 보고(도로관리처-7340)

- 내부순환로 홍지문터널 급경사지 정비에 따른 계약 수량 증·감

＊관련근거 : 홍지물~정릉터널 오픈부 급경사지 정비 계획 보고(도로관리처-6888)

- 올림픽대로 개화IC 체수구간 정비에 따른 계약 수량 증·감

＊관련근거 : 올림픽대로 개화IC 체수구간 긴급 준설 계획 보고(도로관리처-6315)

- 공종별 작업수량 변경에 따른 계약수량 증 감

- 건강, 연금보험료 등 9종 증빙자료 확인 후 정산

나. 설계변경 금액

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	공급가액	1,215,434,546원	1,331,545,455원	증)116,110,909원
	부가가치세	121,543,454원	133,154,545원	증)11,611,091원
	계	1,336,978,000원	1,464,700,000원	증)127,722,000원

다. 주요 공종별 수량변경 현황

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 ․ 감
3S W레일교체(SB5등급)	200x3.2x6330	개	110	121	증)11
방음판 교체(투명)	프레임포함	㎡	237	393	증)156
방음판 재설치(금속재)	2000x500x95	㎡	92	40	감)52
소음감소기외면판재설치	버섯형	m	46	79.5	증)33.5
방음판 교체(투명)	프레임포함, 야간	㎡	-	142	증)142
측구교체(기계)	B=50cm,레미콘(24Mpa)	m	-	265	증)265
배수로신설(U형플륨관)	B=300mm, 기계	본	66	-	감)66
비탈면 점검로 설치	계단식	m	-	154	증)154

3. 행정사항  :  총무처에 변경계약 의뢰

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

.2. 하반기 예산운영 계획 1부.  끝.