문서번호	설비부-113
결재일자	2017.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
유영선		임현근	01/03 권오식
협조

『성동소방서 신축 전기공사』

관급자재(UPS) 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『성동소방서 신축 전기공사』

관급자재(UPS) 납품기한 연기 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인『성동소방서 신축 전기공사』와 관련하여 관급자재(UPS) 설치시기 미도래에 따른 납품기한 연기 검토 결과를 보고 드림.

1. 공사개요

❍ 공 사 명: 성동소방서 신축 전기공사

❍ 위    치: 성동구 행당동 92-6번지

❍ 규    모: 지하1층/지상6층, 연면적 5,194㎡

❍ 공사기간: 2016. 01. 25. ~ 2017. 05. 24.

❍ 시 공 사: ㈜엠쓰리전기 외1

2. 관급자재 계약현황

구 분	계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약금액 (원)	납품기한		비고
				당 초	변 경
무정전전원장치 (UPS)	00157007900 (12-16-2-12294-00)	이화전기공업㈜	29,629,000	2017.01.24.	2017.05.24.

3. 연기검토

❍ 연기사유: 선행공정인 건축공사 진행에 맞게 조정(현 공정율 43.6%) 및  관급자재 설치시기 미도래

❍ 지체상금 부과여부: 미부과

4. 보고자 의견

❍ 관급자재(무정전전원장치)의 납품기한을 연기조치하여 공정관리에 만전을 기하고자 함. 끝.