적산의 길잡이

토목공사 서울형품셈

2016. 12 .

서 울 특 별 시

(계 약 심 사 과)

목    록

⃟  토 목 분 야 [ 30건 ]

	1. 교면방수 바탕정리 2. 기계공구를 이용한 콘크리트 구멍뚫기 3. 철강재 운반 및 하차비 4. 그라우팅(약액주입)을 위한 지반천공 5. 교면물빼기 6. 공중비계 7. 시멘트 운반 8. 몰탈바르기(기계) 9. 수도권매립지도로 건설기계 이동,거리 속도 10. 어스앙카 그라우팅 주입량 11. 콘크리트 코아천공 12. 라인스토핑(상수도부단수차단) 13. 하수도 비굴착 관입구 마무리 14. 상수도 비굴착 관단부링 15. 하수관거 육안조사 16. 하수도 비굴착공법 레진량 17. 절삭 후 아스팔트 덧씌우기 18. 비굴착 경화 라이닝튜브 절단 19. PC박스 강선인장 20. PC암거 설치 21. 임시전력비(전기요금) 22. 소규모 흙막이 건설기계 23. 교통안전유도로봇 설치 및 철거 24. 보도용 「블록포장 철거」 25. 지하매설물 보호공 26. 현장여건에 적합한「운반장비」 27. 강재 구멍뚫기 28. 볼트 조이기 29. 철근콘크리트 구조물 인양홀 천공 30. 건설공사 발생토사 및 암석처리

토목분야

⃟ 적용기준

1. 목적

서울시 본청, 사업소, 자치구, 투자․출연기관에서 시행하는 건설공사의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 제공하는 데 있다.

2. 적용범위

서울시 본청, 사업소, 자치구, 투자․출연기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서는 본 서울형품셈을 건설공사 예정가격 산정의 기초로 활용한다.

3. 적용방법

1. 공사의 예정가격 산정시 본 서울형품셈을 활용한다.

2. 본 품셈은 건설공사 중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며 현장여건, 기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정가격작성기준 제2조에 의거 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 한다.

3. 본 품셈에서 “시공량/일”으로 명시된 항목 중 총 시공량이 본 품(시공량/일)의 기준 미만일 경우에는 현장여건 등을 고려하여 별도 계상한다.

4. 수량의 계산, 설계서의 단위 및 소수의 표준 등에 대한 기타 기준은 정부 표준품셈 적용기준을 준용한다.

⃟ 서울형품셈

1. 교면방수 바탕정리품

(일당)

배치인원(인)		사용기계(대)		시공량(㎡)
방 수 공 보통인부	1 2	굴삭기(0.6㎥) 로더(0.57㎥) 연삭기(9㏋) 발전기(5㎾)	3 3 3 3	2,490
㈜ ① 본 품은 교면방수 바탕정리품에 적용한다. ② 본 품은 자동차 전용도로상에서 평삭후 아스팔트 포장층 1㎝+방수층을 제거하는 경우에 적용하는 야간(8hr) 실사품이다. ③ 송풍기(2.5hp), 그라인더 등의 잡재료 및 공구손료는 별도 계상한다 ④ 굴삭기용 리퍼의 손료는 별도 반영한다.

2. 기계공구를 이용한 콘크리트 구멍뚫기품

(개소당)

규격(㎜)	착암공(인)	해머드릴(hr)
Ø16×400	0.0049	0.024
Ø20×400	0.0058	0.029
Ø25×400	0.0123	0.061
㈜ ① 본 품은 철근콘크리트(240㎏/㎠) 벽체 천공을 기준으로 산출하였음 ② 본 품은 해머드릴 천공 작업 전후 정리 작업이 포함되어 있다. ③ 철근탐사 및 작업여건에 따른 할증은 별도 계상한다. ④ 발전기(전력소모량), 비트는 별도 계상한다.

3. 철강재 운반 및 하차비 산출기준

○ 운반기준(공장상차도 조건)

항 목	철 근	강 재	비 고
적재 장비	마그네틱크레인		공장무상
1회적재량(톤)	5.0	3.76
적재시간(초/회)	2분57초	4분10초
적재 대기	표준품셈 적용
운반 장비	운반수량에 따라 결정
운반경로 및 속도	- 인천구간(인천제철~가좌IC, 50㎞/hr) - 경인고속(가좌IC~신월IC, 80㎞/hr)
주) ① 본품은 철강재류(철근⦁형강) 운반에 적용한다. ② 서울구간의 속도는 서울시 차량통행속도(서울시 교통통계 연보)를 적용한다.

○ 하차기준

구 분	철근	형강	비고
하차시간(초) (준비, 이동, 하차)	120.5	113	공장 무상
인 부(인)	철근공 1	철골공 1
장 비(톤)	7.5	5.0
주) ① 본품은 철강재류(철근⦁형강) 하차에 적용한다. ② 하차는 지게차에 한해 적용한다.

4. 그라우팅(약액주입)용 지반천공

구분	세부공종별 작업시간
세부공종	준비(분/공) T1	토사천공(분/M) T2₁		풍화암천공(분/M) T2₂	ROD삽입(분/공)T3
작업시간	3	0.63		0.9	3.3
구분	인력품			장비품
	직종(규격)		인원(인)	직종(규격)	수량(대)
인력	건설기계운전사		1
	보링공		1
	특별인부		1
장비				지반천공기(102마력)	1
비고	- 작업시간 T=(T1+T2+T3)/f - 작업계수 f · 0.7 : 현장이 협소하고 장애물이 있는경우 · 0.8 : 현장이 넓으며, 장애물이 없는경우 - T1(준비, 인발, 이동) : 분/공 - T2(천공시간) : ∑(L₁×t₁)/공 · L₁: 지층별 천공연장(m) · t₁ : 지층별 천공시간(min/m) - T3 : 이중관 ROD 삽입시간
주] ① 본 품은 그라우팅(약액주입)을 위한 지반 천공품이다. ② 본 품은 천공구경 Ø73㎜에 적용한다. ③ 지반천공기(102마력) 기계손료 계수는 크롤러드릴(110kw)을 준용한다 ④ 케이싱, 비트 등 소모재료 손료는 별도계상한다.

5. 교면물빼기

(단위 : 인, hr/m)

공 종	세부공종		인력	장비
교 면 물빼기	유공관 및 성형줄눈		특별인부 : 0.003 보통인부 : 0.003	-
	주입 줄눈	합판설치 및 철 거	형틀목공 : 0.002 보통인부 : 0.005	-
		주입줄눈	특별인부 : 0.022 보통인부 : 0.022	트 럭(1톤) : 0.002 주입재용해기(100ℓ) : 0.002 주입기 손료 : 노무품의 3%

[주] ① 본 품은 교량상에 유공관(∅10㎜) 및 성형줄눈(T=10㎜, H=40㎜), 주입줄눈

(T=10㎜, H=40㎜), 내수합판(12㎜) 설치하는 경우 적용하는 품이다.

② 본 품은 야간 능률저하 할증이 포함되어 있다.

③ 합판 자재 제작비는 별도 계상한다.

④ 본 품은 전면 교통통제가 이루어지는 교면 포장공사에 적용한다.

6. 공중비계

(단위 : ㎡)

구분	인력(인)	장비(시간)
공중비계	비 계 공 0.048	트럭탑재형크레인(5톤) 0.041
	보통인부 0.016

[주] ① 본 품은 클램프를 이용하여 공중비계를 교량하부에 설치하는 품이다

② 재료의 손율은 다음과 같다

재료 공기	손율(%)
	클램프,강관비계,와이어로프	조임 및 이음철물	합판
3개월	6	12	12
6개월	10	20	16
12개월	19	38	25

③ 크레인 규격은 현장여건에 따라 조정 가능하다

④ 해체 품은 설치 품의 70%로 별도 계상한다.

7. 시멘트 운반

(단위 : 대)

구 분	투입장비		비고
	종류	수량
상 차	지 게 차(3톤)	1	⦁이동회수:4회[200대(8톤)/50대(파레트당) ⦁적재시간 : 15.56분(시멘트 200대) - 지게차 이동.대기, 트럭적재함 열고닫기 : 5분 - 싣고내리기 : 8분(2분×4회) - 왕복이동 : 2.56분(0.64분×4회) ⦁시간당 적재량 : 770대(0.0013시간/대)
운 반	덤프트럭(8톤)	1
하 차	지 게 차(3톤)	1

[주] ① 본 품은 시멘트의 하치장상차도의 조건인 경우 적용하는 품이다.

② 덤프트럭 규격은 현장여건에 따라 조정가능하다.

③ 지게차의 운반거리(하치장↔운반트럭) 기준은 20m 기준으로 적용한다.

④ 시간당 적재량과 적하량은 동일하게 적용한다.

8. 몰탈바르기(기계)

(단위 : ㎥)

구 분	작업별	인 력(인)		장 비(일당)
몰탈바르기 (기계시공)	배합 및 비빔	특 별 인 부	0.436	믹서(200L) 1대 펌프(7.5kw) 1대 공기압축기(7.5kw) 1대 발전기(45KWA) 1대
		보 통 인 부	0.436
	뿜 칠 미 장	콘크리트공	0.436
		미 장 공	1.308
		보 통 인 부	0.436

[주] ① 본 품은 노후 콘크리트제거후 기계를 이용하여 콘크리트 보수 몰탈

바르기에 적용하는 품이다.

② 본 품은 벽체, 천정에 적용한다.

③ 본 품은 할증 미포함으로 별도 가산할 수 있다.

④ 작업량 : 2.293㎥/일로 한다.

9. 수도권매립지도로 건설기계 이동, 거리 속도

(단위 : ㎞/hr)

계			1구간			2구간
경로	속도 (㎞/hr)	거리 (㎞)	경로	속도 (㎞/hr)	거리 (㎞)	경로	속도 (㎞/hr)	거리 (㎞)
개화IC ~ 야적장	20~51 (적재시) 20~53 (공차시)	22.9	개화IC ~거첨로 (포장도로)	51 (적재시) 53 (공차시)	21.7	매립지 내부도로 ~야적장 (비포장도로)	20	1.2

[주] ① 본 품은 매립지까지 토사를 운반하는데 적용하는 품이다.

② 서울구간 차량통행 속도는 서울시 교통통계 연보 적용한다.

10. 어스앵커 『그라우팅 주입량』

○ 주입량 산출 기준                                  (단위 : ㎥)

- 주입산출량

▸1차 주입[천공공 x (자유장+정착장)]

a1 = 3.14×{0.105^2-[0.0147^2×5(강선수)]}/4×L(자유장+정착장)= ㎥/공

▸ 2차 주입(자유장의 2.0배)'

a2 = <3.14×{0.105^2-[0.0147^2×5(강선수)]/4×Lf>×2배 = ㎥/공

a = {a1} + {a2} = _?㎥/공

[주] ① 본 품은 어스앵커 그라우팅 주입량 산출시 어스앵커체 체적 공제에

적용하는 품이다.

② 제거식에 적용한다.

11. 콘크리트 코아 기계 천공

(단위 : m)

착암공(인)	보통인부(인)	굴삭기(hr)	코어드릴(hr)
0.104	0.104	0.83	0.83

[주] ① 본 품은 콘크리트 코아천공시 적용하는 품이다.

② 적용대상은 콘크리트 바닥천공(∮100㎜~∮150㎜)에 적용한다

③ 적용장비는 굴삭기(0.6㎥)+코어드릴(굴삭기에 장착)을 사용한다

④ 작업량 9.6m/일 기준으로 적용한다

12. 라인스토핑(상수도부단수차단)

명 칭	규 격	단위	수 량(㎜)
			600	700	800	900	1000	1100	1200	1350
작업위치선정 및 피복제거		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트배관공		인	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
도 장 공		인	0.117	0.17	0.203	0.23	0.332	0.37	0.408	0.472
공 구 손 료	인력품의	%	3	3	3	3	3	3	3	3
라인스토핑 피팅 부설		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플 랜 트 배 관 공		인	0.319	0.442	0.496	0.627	0.988	1.304	1.554	2.023
특 별 인 부		인	0.224	0.344	0.386	0.483	0.766	1.007	1.205	1.565
트럭탑재형 크레인	5ton	HR	0.405	0.534	0.547	0.56	0.759	0.772	0.785	0.798
라인스토핑 피팅 접합		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트용접공		인	2.338	3.009	3.244	3.449	4.008	4.183	4.377	4.698
발전기+용접기(2대)	50KW +300AMP	HR	3.118	3.963	4.272	4.452	5.105	5.327	5.574	5.983
용접봉(아크용접)	KSE4301,￠4.0㎜	kg	8.602	13.37	14.41	15.32	25.45	26.56	27.79	29.82
라인스토핑피팅 용접부 도장		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
도 장 공		인	0.58	0.64	0.7	0.76	0.8	0.86	0.9	0.94
보통인부		인	0.18	0.22	0.24	0.26	0.26	0.28	0.3	0.32
프라이머		kg	0.34	0.4	0.5	0.56	0.64	0.7	0.84	0.96
라인스토핑 밸브 부설 및 접합		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
배관공(수도)		인	0.363	0.759	0.88	0.88	1.144	1.144	1.144	1.144
보통인부		인	0.264	0.396	0.484	0.484	0.682	0.682	0.682	0.682
트럭탑재형 크레인	10ton	HR	1.298	1.353	1.441	1.441	1.727	1.727	1.727	1.727
라인스토핑 밸브 철거		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
라인스토핑밸브부설및접합		개소	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
라인스토핑 밸브 개폐		회	1	1	1	1	1	1	1	1
특별인부		인	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
동압 피팅 접합	50㎜	개소	1	1	1	1	1	1	1	1
용접공		인	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
발전기+용접기(2대)	50KW+300AMP	HR	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
용접봉(아크용접)	KSE4301,￠4.0㎜	kg	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

명 칭	규 격	단위	수 량(㎜)
			600	700	800	900	1000	1100	1200	1350
동압 태핑	50㎜	개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
배관공(수도)		인	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
보통인부		인	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
태핑머신부설 및 접합		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	0.528	0.745	0.82	0.841	2.592	3.234	3.609	3.953
플랜트배관공		인	0.384	0.389	0.451	0.463	2.011	2.498	2.799	3.058
트럭탑재형크레인	10ton	HR	1.32	1.328	1.343	1.377	1.9	1.916	1.93	1.943
태핑		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	0.223	0.267	0.311	0.311	0.356	0.4	0.667	0.8
플랜트특별인부		인	0.223	0.267	0.311	0.311	0.356	0.4	0.667	0.8
발전기	50KW	HR	1.67	2	2.333	2.333	2.667	3	5	6
라인스토핑밸브개폐		회	2	2	2	2	2	2	2	2
태핑머신 철거		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
태핑머신부설및접합		개소	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
칩제거머신부설및접합		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
배관공(수도)		인	0.058	0.077	0.097	0.097	0.459	0.564	0.62	0.682
특별인부		인	0.042	0.04	0.053	0.053	0.356	0.435	0.481	0.528
트럭탑재형크레인	5ton	HR	0.206	0.219	0.232	0.245	0.344	0.357	0.37	0.383
칩제거		회	1	1	1	1	1	1	1	1
기계설비공		인	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
라인스토핑밸브개폐		회	4	4	4	4	4	4	4	4

[주] ① 본 품은 상수도 부단수 차단시 시공에 적용하는 품이다.

13. 하수도 비굴착 관입구 마무리

(단위 : ㎥)
관경(D)	모르타르(㎏)	미장공(인)	보통인부(인)	비고
0.25	4.75	0.014	0.006
0.30	5.43	0.016	0.007
0.40	6.79	0.021	0.008
0.45	7.47	0.023	0.009
0.50	8.15	0.025	0.010
0.60	9.51	0.029	0.012
0.70	10.87	0.033	0.013
0.80	12.23	0.037	0.015
0.90	13.58	0.041	0.017
1.00	14.94	0.045	0.018
1.10	16.30	0.049	0.020
1.20	17.66	0.053	0.022

[주] ① 본 품은 하수도비굴착시 관입구 마무리공사에 적용하는 품이다.

② 보수규모는 폭 10cm, 두께 2cm(3회)이내(현장 여건에 따라 조정 가능)

③ 마감자재는 초속경 모르타르 적용(단위중량 2,100kg)한다.

④ 재료 할증은 3% 적용한다.

14. 상수도 비굴착 관단부링

(단위 : 개소당)

관경(㎜)	철판공(인)	보통인부(인)	비고
700∼800	0.053	0.053
900∼1,000	0.063	0.063

[주] ① 본 품은 상수도비굴착 관입구 관단부링 공사에 적용하는 품이다.

15. 하수관거 육안조사

(단위 : m)

구 분	수량	비 고
초급 기술자	1인
특 별 인 부	1인
보 통 인 부	2인
승 합 차(9인승)	2hr
조 명 등	5hr
필 름	-	공구손료 포함
공 구 손 료	3%	(인력품)
소 계(일당)

[주] ① 본 품은 하수도 유관조사로 1,000㎜ 이상에 적용한다

② 신설관 750m, 기존관 500m를 기준으로 한다.

③ 작업할증 : 하수관거 규격에 따라 구분 적용(관내부조사 인력만 할증 적용)

- H=2.0m 미만 : 20% (유해10%+협소10%), H=2.0m 이상 : 10% (유해10%)

16. 하수도 비굴착공법 레진량

(단위 : Kg)

관 경(㎜)	튜브두께(㎜)	수지(레진) 수량	비고
300	3.0	2.984
400	4.0	5.305
450	4.5	6.715
500	5.0	8.290
600	6.0	11.937
700	7.0	16.248
800	8.0	21.221
900	9.0	26.858
1,000	10.0	33.158
1,100	11.0	40.122
1,200	12.0	47.748

[주] ① 본 품은 하수도 비굴착공사시 소요되는 레진량 산출 적용에 사용한다

17. 절삭 후 아스팔트 덧씌우기

(단위:일당)

구 분		절삭두께별 장비가동을 감안한 장비별 능력			비 고
		10㎝	12.5㎝	20㎝
1일 작업량(a)		25	24	7	자동차전용도로
				8	일반간선도로
장비가동시간(hr)	절삭장비	5.5	6.0	4.0	유류비 산출기준
	포장장비	8.0	8.0	7.0

[주] ① 본 품은 아스팔트 절삭두께 10cm 이상에 적용하는 품이다.

② 본 품은 할증 미포함으로 별도 가산할 수 있다.

18. 비굴착 경화 라이닝튜브 절단

(단위:개소)

관경(㎜)	작업인력(인)		투입장비 및 자재		구경별 환산 연장(m)
	특별인부	보통인부	발전기(hr)	컷소날(개)
600	0.041	0.082	0.073	0.17	1.884
700	0.043	0.086	0.085	0.19	2.198
800	0.046	0.092	0.097	0.22	2.512
900	0.047	0.094	0.109	0.25	2.826
1,000	0.049	0.098	0.122	0.28	3.140
1,100	0.052	0.104	0.134	0.31	3.454
1,200	0.053	0.106	0.146	0.33	3.768

[주] ① 본 품은 상. 하수도 비굴착 경화 라이닝튜브 절단에 적용하는 품이다.

② 전동절단 톱(컷소) 및 발전기(5kw)는 별도 계상한다.

③ 잡재료비 및 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

19. PC박스 강선인장

(단위 : 본)

종 별		기계설치공(인)	특별인부(인)	보통인부(인)
1연 박스	7φ 12.7㎜	0.13	0.05	0.05
2연 박스	7φ 12.7㎜	0.30	0.10	0.10

[주] ① 본 품은 PC-BOX 강선인장 작업에 적용하는 품이다.

② 강선 및 PC콘 등의 자재는 별도 계상한다.

③ 인장기 등 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

20. PC암거 설치

(단위 : 본)

암거 중량(톤/본)	보통인부(인)	특별인부(인)	크레인(hr)	크레인(톤)
4~5 미만	0.76	0.22	1.20	20
5~6 미만	0.82	0.24	1.52	20
6~7 미만	0.80	0.24	1.70	30
7~8 미만	1.04	0.31	1.84	30
8~9 미만	1.15	0.34	1.58	40
9~10 미만	1.25	0.37	1.69	40
10~11 미만	1.29	0.38	1.61	50
11~12 미만	1.29	0.39	1.47	60
12~13 미만	1.41	0.42	1.62	60
13~14 미만	1.49	0.45	1.70	60
14~15 미만	1.56	0.47	1.78	70
15~16 미만	1.64	0.50	1.87	70

[주] ① 본 품은 암거중량 4톤 이상에 대한 암거설치에 적용하는 품이다.

② 암거중량 4톤 미만은 표준품셈 6-7-2(중량구조물설치)를 적용한다.

21. 임시전력비(전기요금)

(단위 : Kwh당)

구 분	전기요금 기준
계약전력 3kW 이하	주택용전력 요금
계약전력 4kW ~ 300kW 미만	일반용전력(갑) Ⅰ,Ⅱ 요금
계약전력 300kW 이상	일반용전력(을) 요금

[주] ① 본 기준은 한국전력공사 전기공급약관 제64조(임시전력) 및 별표 1

(전기요금표) 기준에 따라 임시전력비를 산정하는 기준이다

② 전기요금에 전력산업기반기금(전기요금의 3.7%)을 별도 계상한다

③ 임시전력의 가설․철거 품은 별도 계상한다

④ 발전기 가동비가 2,000만원 이상인 경우는 임시전력 사용을 검토할 필요가 있다

22. 소규모 흙막이 건설기계

(단위 : 본)

구 분	길 이	크레인 규격
띠장 / 버팀보	5m 이하 6 ~ 8m	10 톤

[주] ① 본 품은  상․하수도 관로공사, 띠 모양 굴착공사, 강관압입 추진구 및

도달기지 등 소규모 흙막이(H-Beam 설치 및 철거시)의 적용하는 품이다

② 작업여건에 따라 H-Beam 설치 및 철거는 표준품셈 5-2-1 기준에

따른다

23. 교통안전유도 로봇 설치 및 철거

가. 로봇 설치 및 해체

(단위 : 개소)

구 분	규 격	단위	수 량	비고
① 교통로봇설치/해체	70cm(d)×50cm×183cm(h)
보통인부		인	0.06
② 천 공	￠20×100㎜
함머드릴	TE-60	hr	0.00725
착암공		인	0.00145
③앵커설치/철거
셋트앵커	￠10×100㎜	개	4
보통인부	앵커 및 약액 주입 등	인	0.0582
볼트조이기,풀기	임펙트렌치	공	4

[주] ① 천공에서 잡재료비는 인력품의 5%를 계상한다

② 볼트조이기 품은 임펙트렌치(전동드릴) 손료(0.00052개/공),

철공(0.002인/공), 잡재료비(인력품의 5%)를 계상한다

③ 비트는 별도 계산한다.

나 로봇 손료

(단위 : 개소)

구 분	규 격	손 료(%)
		3개월	6개월	1개년	1개년 이상
교통로봇	70×50×183cm(H)	15	30	50	70
베터리+충전기		25	50	100	200
신호봉(일체형)		25	50	100	200

[주] ① 교통로봇은 모터 및 구성품 일체를 포함한다

② 전기 사용시는 배터리 및 충전기를 제외한다

③ 신호봉의 내구연한은 12개월(1일 12시간 사용)을 기준한다

24. 보도용「블록 포장 철거」

[1] 보도용 블록 포장철거(재사용)                          (단위 : 일)

공 종	규 격	시공량(㎡)	작업인원(인)		비고
소형고압블록포장철거	t=6～8cm	300	특별인부 보통인부	1 2	장비 제외 (플레이트콤팩터, 굴삭기)
대형블록포장철거	50×50×4.5cm	270
보도용콘크리트블록포장철거	30×30×6cm	370

[주] ① 본 품은 보도용 블록 포장 철거품에 적용한다

[2] 보도용 블록 포장철거(기존 블록 폐기물처리)             (단위 : ㎥)

공 종	사용기계(1대)				비고
	명칭	규격	단위	작업량(㎥/hr)
소형고압블록포장철거(t=6～8cm)	파쇄물 절취 및 집적	굴삭기 0.2~0.4㎥	㎥	k : 0.55 f : 0.71(폐콘크리트) E : 0.45 cm : 15(90°)	작업 인원 제외
대형블록포장철거(50×50×4.5cm)
보도용콘크리트블록 포장철거 (30×30×6cm)

[주] ① 본 품은 기계 작업이 어려운 협소한 장소에 대하여는 인력 적용하고,

원가산출시 작업인원(특별인부,보통인부)은 설치품의 50%이내로 계상

한다.

25. 지하매설물 보호공

○ 사용자재 손율 및 작업능력 조정

구 분	손료조정	비 고
각 재(외송)	12%	각재 3개월 이하 손율 적용
와이어로프,턴버클, 클립, 꺽쇠	6%	강관동바리 3개월 이하 손율 적용
H빔 설치 및 철거	20%	표준품셈 5-2-1(버팀보) 적용
[주] ① 지하매설물 매달기시 해당 시설관리자와 충분한 협의 ‣ 관경 100~700㎜이하 : 2m당 1개소 설치 ‣ 관경 800~1,000㎜이하 : 1m당 1개소 설치 ② 특수규격의 지장물은 별도 매달기 도면에 의거 산출 ③ 3개월 이하 손료를 적용한다

26. 현장여건에 적합한「운반장비」

○. 서울시 도로별 장비 적용

도로 구분	굴착 장비 (터파기, 되메우기)	운반 장비 (덤프트럭)	비 고
폭원 4m 미만	인력	2.5톤	장비 진입이 곤란한 경우
	굴삭기 0.2 ㎥	4.5톤
폭원 4m이상 ~6m 미만	굴삭기 0.2 ㎥	4.5톤
폭원 6m이상 ~ 8m미만	굴삭기 0.4 ㎥	15톤
폭원 8m 이상	굴삭기 0.7 ㎥ 이상	24톤

[주〕① 현장여건 또는 작업방법에 따라 장비 적용을 달리할 수 있다

② 토사의 적치장(중간집하장)~사토장(매립지 등)간 운반장비는 덤프트럭 24톤을 적용한다

27. 강재 구멍뚫기

(단위 : 공)

두 께 (mm)	마그네틱드릴 (hr)	비 트 (개)	윤활유 (ℓ)	철골공 (인)
9	0.01	0.0014	0.002	0.0011
10	0.01	0.0016	0.002	0.0012
12	0.01	0.0019	0.002	0.0015
14	0.01	0.0021	0.002	0.0017
15	0.01	0.0023	0.002	0.0019
18	0.01	0.0029	0.002	0.0025
24	0.01	0.0036	0.002	0.0032

[주〕① 잡재료비는 인력품의 3%를 계상한다

② 마그네틱전기드릴의 기계손료는 5,200×10⁷를 계상한다

28. 볼트 조이기

(단위 : 공)

구 분	단 위	수 량	비 고
임펙트렌치(전기드릴)	개	0.00052
철 골 공	인	0.002

[주〕① 잡재료비는 인력품의 5%를 계상한다

② 볼트 풀기는 조이기 품의 80%를 계상한다

29. 철근콘크리트 구조물 인양홀 천공

(단위 : 공)

무게 구분		0.7톤 미만		1.5톤 미만		2.8톤 미만		5.7톤 미만
천공홀 규격	구경	Ø50㎜		Ø75㎜		Ø100㎜		Ø150㎜
	두께	15㎝	30㎝	15㎝	30㎝	15㎝	30㎝	15㎝	30㎝
천공홀당 단가(원)		표준품셈 기계설비 1-8 배관을 위한 구멍뚫기 적용 하여 단가 산출

[주〕① 본 품은 육교, 교각 등 각종 철근콘크리트 구조물 철거에 필요한

인양홀 천공에 적용하는 기준이다.

② 인양홀 크기를 철거구조물의 무게별로 세분화하여 적용한다.

30. 건설공사 발생 토사 및 암석 처리

구분	처리방법
토사	『토사정보시스템』을 통한 최단거리 사토장 확보처리
암석	공사현장 인근 골재업체 등을 통한 『매각처리』
비고	토석정보시스템(국토교통부) : http://www.tocycle.com

[주〕① 건설공사 중 발생하는 토사 및 암석에 대한 처리기준이다.

② 차량 운반속도는 서울시 차량통행속도 조사결과(도시교통본부, 매년)를 적용한다.

③ 암석 매각처리는 연암이상인 경우에 적용한다.

④ 암석의 분류(지반조사편람, 서울특별시)

구분	풍화암	연암	보통암	경암	극경암	비고
압축강도(qu, kgf/㎠)	qu<100	100≤qu<500	500≤qu<1000	1000≤qu<1500	qu≥1500