문서번호	조경과-304
결재일자	2017.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	조경과장	푸른도시국장
현호재	변동풍	이원영	01/06 최광빈

2016년 가로정원 조성사업 추진결과 보고

2017. 1.

푸 른 도 시 국

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 가로정원 조성사업 추진결과 보고

통행위주의 가로를 꽃과 나무, 쉼터가 어우러진 정원 같은 아름다운 길로 조성하기 위한「2016년 가로정원 조성사업 」추진결과를 보고합니다.

1		사업개요

❍ 대    상: 동대문구 제기로 등 11개소

❍ 규    모: 2,020m(면적 5,020㎡)

❍ 사업기간: 2016. 1. ~ 12.

❍ 사업내용: 가로정원 조성(보행지장물 녹화, 화목류 식재, 쉼터 조성 등)

❍ 사업예산: 1,713백만원(시설비 1,711, 시설부대비 2)

2		2016년 사업추진 내역

	<중점 추진사항>
‣ 안전하고 쾌적한 걷고 싶은 가로 보행 환경 조성 ‣ 심미적 위안을 주는 아름다운 가로 조성 ‣ 편안하게 쉴 수 있는 휴식공간 조성 ‣ 만남과 소통이 있는 사회적 공간 조성

❍ 정원조성 및 식재

개 소	부 지		조성면적 (㎡)	식 재
				수 목 ㈜				초화류 (본)
	연장 (m)	면적 (㎡)		계	교목	관목	덩굴
11	2,405	9,946	4,480	22,527	235	21,572	720	47,141

❍ 휴게시설

의 자					의자형휀스 (m)
계	등의자(조)	조형의자(조)	석재의자(조)	앉은벽(조)
79	54	14	9	2	-

❍ 잘된 점

- 서울형 공공조경가그룹의 설계심의 참여로 설계 수준향상

- 다양한 화목류를 볼 수 있는 심미적 가로조성

- 휴게시설(의자 등)을 설치하여 편안한 가로 쉼터제공

- 시민참여 사후관리를 위해 인접 건물주와 ‘나무돌보미’ 체결

❍ 미흡한 점

- 성북구 성북로 등 가로정원 조성사업 사고이월(2건 224백만원)

▸ 선행 공정(대표보행거리조성 설계용역 지연) 및 동 사업구간내 지장물

(가스정압기) 이설 관련 유관기관 업무협의 지연 등

- 마포구 가양대로 가로정원 조성사업 사고이월(1건 208백만원)

▸ 사업대상지 변경 관련 민원사항 처리 및 업무협의 지연 등

❍ 개선할 점

- 가로정원 조성 전부터 주변 개발상황 등을 사전에 면밀히 검토 필요

- 시민참여 사후관리를 위해 인접 건물주와 ‘가로정원 입양제’를 추진 필요

3		예산집행

(단위 : 천원)

예산과목	예산현액	집 행 액	집행잔액	집 행 율	비 고
합 계	1,713,000	1,100,955	612,045	64%	사고이월(3건)
시 설 비	1,711,000	1,098,955	612,045	64%	432,464(별도)
시설부대비	2,000	2,000	0	100%	-

4		2017년 중점 추진사항

❍ 서울형 공공조경가그룹의 설계 및 심의 참여로 설계 수준향상

❍ 자치구별 사업추진 담당자가 참여하는 우수사례지 현장견학 추진

❍ 사업 전 단계부터 인접 건물주와 ‘가로정원 입양제’ 를 추진하여 설계, 시공 뿐만 아니라 사후관리까지 참여 유도

붙임 1. 2016년 가로정원 조성사업 추진실적 1부.

2. 2016년 가로정원 조성사업 추진 현황사진 1부.

3. 2016년 가로정원 조성사업 사고이월 내역서 1부.  끝.