보 고 서
			담당	팀장	상가운영처장	복지경제본부장
문서번호	상가운영처-17750
보존기간	준영구		협 조	대리
결재일자	2016.12.16.			주임
공개여부	공개
제 목	설계변경 보고[터미널 지하도상가 편의시설(에스컬레이터) 설치공사]

1		공사현황

가. 공 사 명：터미널 지하도상가 편의시설(에스컬레이터) 설치공사

나. 공사기간：2016. 06. 23 ∼ 2016. 12. 19

다. 공 사 비：489,858,000원

라. 공사개요 : 에스컬레이터설치(800형) 2대

마. 시 공 자：고양종합건설(주) 대표 이홍준, (주)한양티센 대표 김정민

2		보고내용

- 상기 공사의 설계변경을 아래와 같이 보고합니다.

가. 설 계 변 경 사 유

1) 실정보고에 의한 주요변경사항

○ [공사장 외곽휀스 설치범위 변경]

『관련근거 : 상가운영처-12734호(2016.09.09)』

- 개략공사비 : 증 2백만원

○ [캐노피 철거 및 PC판넬 변경]

『관련근거 : 상가운영처-14466호(2014.10.17)』

- 개략공사비 : 감 20백만원

○ [사급자재(철근) 품질시험비 반영]

『관련근거 : 상가운영처-17247호(2016.12.08)』

- 개략공사비 : 증 0.6백만원

2) 기 타

○ 띠장설치(H-300×300) 설치 등 실시공량 정산

나. 공사비 변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
도급비	공급가액	445,325,455	408,030,000	감) 37,295,455
	부가가치세	44,532,545	40,803,000	감) 3,729,545
	계	489,858,000	448,833,000	감) 41,025,000

3		조치계획

- 상기와 같이 설계변경 사항을 총무처에 의뢰하여 변경계약 하고자 함.

- 변경계약 후 제경비관련 준공정산 시행.

따로붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 수량산출서 등 각1부.  끝