문서번호	생산관리과-62
결재일자	2017.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
신왕근		한희선	01/02 구자훈
협 조

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)』

책임기술자 변경 및 동절기 공사중지 요청에 대한 검토 보고

2017.  01.

상수도사업본부

(생산부 생산관리과)

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)』

책임기술자 변경 및 동절기 공사중지 요청에 대한 검토 보고

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)” 관련하여 책임사업관리기술자 변경 및 동절기 공사중지 요청이 있어 검토사항을 보고 드림

※ 관련문서 : 한국종합기술 2016-12-1087호(’16.12.23) 및 뚝도건 제16-111호(’16.12.30)

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계)-장기계속공사

❍ 공사기간 : 2015. 11. 27. ~ 2017. 06. 30.

❍ 공 사 비 : 3,673,791천원

❍ 계 약 자 : ㈜청미건설 대표 양국진

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

❍ 공사내용 : - 농축조 2지 신설 및 기존 2지 재건설

(D31m×H4m×2지, D35m×H4m×2지, V=13,735㎥)

- 노후 배출수처리시설 개량

Ⅱ		현황 및 문제점

❍ 공사 현황 : 농축조(D35) 콘크리트 구조물 공정

❍ 문제점

- 책임건설사업관리기술자자(이찬욱) 퇴사에 따른 업무 수행 불가

- 동절기 기온강하에 따른 공사 안전위험 및 품질저하 등 우려

Ⅲ		검토 의견

□ 책임건설사업관리기술자 변경 적정성 검토

❍ 변경 사유 : 당초 배치된 책임건설사업관리기술자인 이찬욱의 퇴직으로                       인하여 업무수행 불가

❍ 검토 기준

- 건설기술진흥법 제35조, 시행령 제52조, 시행규칙 제28조에 따른 “뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사” 사업수행능력 세부평가기준

❍ 경력비교표

구 분	기 준		경력 현황		평가결과
			당 초	변 경
성 명			이찬욱	강영근
등 급	고급이상		특급	특급	적정
상수도분야 경력	3년 이상		4.54년	12.29년	적정
해당분야 경력	5년 이상		20년 10월	28년 09월	적정
직무분야 실적	1	12년 이상	20년 10월	34년 05월	적정
	2	5년 이상	13년 03월	21년 06월	적정
교육훈련	2주 이상		2주 수료	2주 수료	적정

❍ 검토 결과

-「뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 사업수행능력 세부평가기준」에   따라 평가한 결과, 본 공사의 책임건설사업관리기술자로 업무수행함   에 있어 적합할 것으로 판단됨

□ 동절기 공사중지 검토

❍ 중지 사유

- 동절기 기온강하에 따른 공사장 안전위험 및 품질저하 우려

- 동절기 레미콘 작업 불가로 농축조(D35) 구조물공사 불가

- 토목 구조물 공사 완료 후 기계, 전기공사 가능 등

❍ 동절기 공사중지 기간 : 2017.01.01.~2017.02.28.(59일간)

❍ 검토 결과

- 공사장 안전사고 예방 및 공사 품질향상, 동절기 레미콘 작업 불가   등의 사유로 동절기 동안 공사 중지함이 타당함

Ⅳ		조치 의견

❍ 상기 검토내용과 같이 책임건설사업관리기술자 변경(이찬욱→강영근) 및 동절기 공사중지 승인 요청 사항이 타당하므로 이를 승인코자 하며,

❍ 공사중지 기간에는 토목분야 사업관리기술자만 필요시 간헐 투입하여 뚝도정수센터 농축조 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 책임건설사업관리기술자 변경 승인 요청 공문 1부.

2. 동절기 공사중지 승인 요청 공문 1부. 끝.