		주식 회사	동명기술공단	종합건축사 사 무 소
		남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사외 1개소 전면책임감리용역

우 152-092 서울 구로구 개봉2동 403-22 청송B/D 4F / ☎(02)2060-5938 / FAX(02)2060-5939

책 임 감 리 원    탁 승 국              E-mail : nambusun@empal.com

문서번호 : 남부감 제14-66호 시행일자 : 2014. 3. 17. 수 신 : 도시기반시설본부장 참 조 : 토목부장	선결				지시
	접수	일자 시간
					결 재 ․ 공 람
		번호
	처 리 과
	담 당 자

제    목 : 준공기한 연기요청(7차공사)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「남부순환로(개봉역앞)구조개선공사」시행중 시점부 개봉두산아파트 경계부 담장 옹벽시공 반대 민원으로 잔여공사 추진을 위한 절대공기 부족에 따른 7차공사 준공기한 연기요청 및 수정예정공정표를 도급사인 (주)케이에스씨건설로부터 제출받아 붙임과 같이 보고 드리니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 공기연장사유서(시공사 제출분), 회의록 각1부.

3. 개봉두산아파트 민원관련 공문사본 1식.

4. 7차공사 추진현황도 1부.

5. 두산아파트 경계부 담장옹벽 세부 예정공정표 1부.

6. 7차공사 당초,·변경 수정예정공정표 각 1부.

7. 케이에스씨건설 2014- 47호 공문사본 1부.  끝.

남부순환로(개봉역앞)

구조개선공사외 1개소

책 임 감 리 원  탁 승 국