문서번호	총무과-2020
결재일자	2017.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		통신관리팀장	총무과장
조윤현		김완집	01/16 정상택
협조

2017년 본관청사 통신공사(연간단가) 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1.

행 정 국

(총무과)

2017년 본관청사 통신공사(연간단가) 계획

본관 및 임차청사, 남산별관 등의 조직개편, 인사발령 등에 따른 사무실 재배치관련 통신장비, CCTV, CATV 및 출입관리시스템 등의 이·증설을 위한 통신공사 연간단가 계약을 추진하고자 함

관련근거

❍ 2017 통신·음향시스템 운영 및 유지관리 계획(총무과-39708호, ‘16.11.17.)

추진배경

❍ 사무실 재배치에 따른 전화통신망, 출입관리 및 보안시스템 등의 이전 설치

❍ CCTV 음영지역 해소 및 화질 개선 등을 위한 카메라 신설 및 이전

❍ 조직개편 및 인사발령 등으로 인한 신규 전화설치 및 이설

사업개요

❍ 사 업 명 : 2017년 본관 청사 통신공사(연간단가)

❍ 사업기간 : 착공일로부터 2017.12.31. 까지

❍ 대상범위 : 본관, 임차청사(무교, 청계), 남산별관, 교통정보센터 등

❍ 공사내용

- 인터넷전화망 및 시설망, 인터넷전화기 등 이·증설

- CCTV, CATV 및 출입관리시스템, 전자경비 등 이·증설

※ IPT전화기 설치 절차(예시)

	⇒
파티션 완료		케이블 포설	통신배관 배선	접속단자 연결	통신장비 설치	회선시험	전화기 설치

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격 요건을 갖춘 업체

- 정보통신공사업법 제14조 규정에 의한 정보통신공사업 등록을 필하고 서울시에 주된 영업소 둔 업체

소요예산 : 215,000천원

❍ 예산과목

- 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 청사관리, 사무실 재배치에 따른 시설 개·보수, 시설비 : 115,000,000원

- 행정국 총무과, 행정지원체계 강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비 : 100,000,000원

추진일정

❍ 계약심사 의뢰 및 사업 발주	: ‘17.1.17 ~ 1.26.

❍ 계약자 선정 및 착공	: ‘17.2월 중순

❍ 사업 수행 및 운영	: ‘17.3월 ~ 12월

기대효과

❍ 조직개편 등에 따른 원활한 정보통신 서비스 제공

❍ 통신장비 및 네트워크 장애시 신속한 복구체계 운영

❍ CCTV 카메라 화질 개선으로 시인성 향상

행정사항

❍ 계약심사 및 사업 발주 의뢰 – 계약심사과, 재무과