등록번호

교통행정과-5311

★주무관

교통시설팀장

교통행정과장

안전건설교통국장

부구청장

등록일자

2017.1.23.

인성분

조봉기

이준영

이경우

01/24

조인동

결재일자

2017.1.24.

공개구분

대시민공개

협  조

		- 남가좌2동 제2공영주차장 건립 부지내 - 건축물 철거공사(주택 4개 동) 완료 보고

서 대 문 구

교통행정과

- 남가좌2동 제2공영주차장 건립 부지내 -

건축물 철거공사(주택 4개 동) 완료 보고

주택가 주차난 해소를 위해 추진하고 있는 ‘남가좌2동 제2공영주차장 건립’과 관련, 사업부지내 보상완료(공가)된 주택 4동의 철거공사가 완료되었음을 보고함.

Ⅰ		추진근거

남가좌동 공용주차장 건립계획(교통행정과-37104호, 2014. 8.31.)

철거공사 및 폐기물처리용역 시행계획(교통행정과-43794호, 2016. 8. 3.)

Ⅱ		공사개요

공 사 명 : 남가좌2동 제2공영주차장 건축물 철거공사

위     치 : 남가좌2동 3-75외 8필지 (면적 : 1,134㎡)

철거 대상 : 건축물 7개 동, 연면적 922.2㎡

※ 건설폐기물 약 2,960톤

계약현황

구 분	철거공사	건설폐기물 처리용역
업 체 명	㈜시원씨엔에스 대표 최규엽	㈜터원 대표 김병원
과업기간	2016.10. 7. ~ 2017.10. 1.	2016.10.14. ~ 2017.10. 8.
계 약 일	2016.10. 6.	2016.10.14.
계약금액	122,427,200원	86,810,700원

위치도 및 현황사진

Ⅲ		철거개요

보상(이주)완료된 공가(주택 4동) 철거공사 시행

※ 철거공사: 남가좌동 3-78, 3-93, 3-94, 3-95

철거대상 건축물 현황 : 7개 동

연번	지 번	건축개요				보상여부	비고
		층수	구조	용도	연면적 (㎡)
1	남가좌동 3-78	지하1/1	연와조	주택	96.69	보상완료	철거 완료
2	남가좌동 3-93	2층	연와조	주택	112.76	보상완료	철거 완료
3	남가좌동 3-94	지하1/2	연와조	주택	96.86	보상완료	철거 완료
4	남가좌동 3-95	지하1/1	연와조	주택	95.61	보상완료	철거 완료
5	남가좌동 3-75	지하1/2	연와조	다세대 주택(3)	176.13	보상완료	재결 중
6	남가좌동 3-79	지하1/2	연와조	단독주택	172.25	보상완료	재결 중
7	남가좌동 3-76	지하1/2	연와조	단독주택	171.9	보상완료	세입자 미이주
	계				922.2

추진경과

- 2017. 1.10. ~ 1.11. : 철거공사 안내

- 2017. 1.12. ~ 1.13. : 철거자재 반입 및 가림막 설치

- 2017. 1.16. ~ 1.21. : 건축물 철거 공사 시행(주택 4동)

공사 중

3-94

3-78

3-95

3-93

공사 후

공사 후

보고내용

- 당초에는 방음벽 설치 후 철거공사를 시행하고, 철거완료 후 임시주차장으로 활용코자 계획하였으나,

- 주변 거주민의 안전사고 우려 및 현황여건상 방음벽 설치 및 임시주차장 조성이 불가능하여 가림막 설치 및 EGI휀스로 마감 조치함.

- 변경사항에 대해서는 추후 설계변경에 반영하여 처리하고자 함.

Ⅳ		향후 추진계획

2017. 1월 : 건축물대상 말소 요청

2017. 3월 : 3개 동 철거공사 시행

2017.10월 : 공사 준공.  끝.