문서번호	급수운영과-2052
결재일자	2017.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김재영		최용진	01/25 장종욱
협조

급수공사 연기보고서

(신설 115, 116, 122, 개량 43번)

2017. 1

북부수도사업소

급수운영과

명에 의거 도봉구 관내 지역담당 업무 수행 중 공사기간 연기 사유가 발생하여

아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

가. 공 사 명 : 2016년 도봉구 관내 급수공사

나. 도 급 자 : (주)씨엔케이굿즈 대표 정성훈

□ 보고내용

○  급수공사 작업지시 사항 중 아래와 같은 사항으로 부득이 현장 여건상 공사기한 연기가

필요한 실정임.

공 사 종 류	공사 위치	공사 개요	연 기 사 유	공 사 기 간
				당 초	변 경
신설115번	도봉동 62-3	신설	수요가 내부공사 등 일정 지연으로 연기	2017.1.4. ~1.25	2017.1.4. ~2.18
신설116번	도봉동 62-40	신설	수요가 내부공사 등 일정 지연으로 연기	2017.1.4. ~1.25	2017.1.4. ~2.18
신설122번	도봉동 62-43	신설	수요가 내부공사 등 일정 지연으로 연기	2017.1.10. ~1.25	2017.1.10. ~2.18
개량 43번	도봉동 618-28외	개량	건축공사 및 수용가와 일정조정 지연으로 연기	2016.1.20 ~2016.1.31	2016.1.20 ~2017.02.08
			이 하 여 백

□ 처리의견

○ 원활하고 안전한 급수공사 시행을 위해 공사기한을 연기하여 민원 처리에 만전을 기하

고자 합니다.  끝.