문서번호	원무과-1683
결재일자	2017.1.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	시설팀장	원무과장		서북병원장
차혁진	조선행	김종환		01/26 박찬병
협 조
	진료부장		서해숙

「 BL3 실험실 구축공사 」연계

진단검사의학과 재배치 등 사업추진 계획

2017. 1.

서울특별시 서북병원

[원무과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「BL3 실험실 구축공사」연계

진단검사의학과 재비치 등 사업추진 계획

서북병원 BL3 실험실 구축공사에 따른 진단검사의학과 사무실 재배치 공사를 기 추진중인 BL3 실험실 구축공사와 연계하여 조속하게 시공하고 하자책임을 담보하여 사업추진 하고자 함

□ BL3실험실 구축공사 사업개요

◦ 공 사 명 : 서북병원 BL3실험실 구축공사

◦ 규   모 : BL3실험실 103.66㎡

- 기계설비, 건축, 전기, 통신, 소방, 관급자재

◦ 계 약 자 : ㈜농은이앤씨, 고황건설주식회사

◦ 공사기간 : 2016.11.24. ~ 2017.4.22.

◦ 공 정 율 : ‘17.1.23 현재 17%

□ 진단검사의학과 시설 재배치

◦ 사 업 명 : 서북병원 BL3실험실 구축공사에 따른 진단검사의학과 사무실 및 당직실 등 재배치

◦ 연계사유 : BL3 실험실 구축공사에 따른 기존사무실 재배치 사업으로 기 공사중인 계약자와 설계변경 하여 사업추진

□ 예산내역

◦ 진단검사의학과 시설 재배치 예산 사용내역

- 예산과목 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진, 서북병원 운영,

서북병원 청사시설 운영관리, 시설비

- 예 산 액  : 90,000천원

▷ 시설물 재배치에 따른 건축 등 시설물 공사  : 50,000천원

▷ BL3 실험실 구축에 필요한 CCTV 설치공사 : 20,000천원

▷ 시설물 재배치 및 보일러 교체 배관공사     : 20,000천원

□ 사업추진 방향

◦ 시설물 재배치 건축공사 : BL3 실험실 구축공사 설계변경(50백만원)

- BL3 실험실 구축에 따른 진단검사의학과 사무실 및 당직실 등 재배치 공사로 기존 실험실 구축공사 계약자와 협의하여 설계변경으로 추진

- BL3 실험실 구축 계약당사자와 협의하여 설계변경 추진하므로 조속한 시공 및 완벽한 하자책임 등 공사에 따른 책임담보 확보가능 함

◦ CCTV 설치공사 : 조달청 총액 물품구매 (20백만원)

- 조달청에 계약의뢰하여 조달우수제품 구매설치

◦ 보일러 교체 배관공사 : 보일러납품 설비업체 수의계약 (20백만원)

- 보일러 교체 : 조달청 3자 단가계약으로 기 계약완료(‘16.11.28)

- 원활한 공사시행 및 하자책임 한계의 명확성을 확보하기 위하여 보일러 구매업체와 계약하여 일괄시행

◦ 대기배출시설 인허가 신청 : 환경컨설팅 ㈜대동환경 수의계약

- 예산액 : 1,320천원(공공운영비)

- 보일러 설치전 대기배출시설(보일러) 설치신고(관할 은평구)

□ 향후 추진계획

◦ 시설물 재배치 건축공사  : ‘17. 2~3월 설계변경

- BL3 실험실 구축에 따른 진단검사의학과 요구사항 및 시공가능 여부검토후 내역 및 규모 설계변경

◦ CCTV 설치공사     : ‘17. 2~3월 구매설치

- 수요 및 설치대수 등 검토후 조달구매 및 설치

◦ 보일러 교체 배관공사 : ‘17. 1~2월 수의계약

- 보일러 낙찰 설비업체 ㈜ 시흥이엔지 대표 김현식.

◦ 대기배출시설 인허가  : ‘17. 1~2월 수의계약

- 환경컨설팅 ㈜대동환경 대표 박상우.    끝.