□ 광역 철도 및 도로 등 기반시설 정비 현황

○  주요 광역철도 사업현황

❚ 국가시행 - 공사 중 (3개 노선 81.3km)

노선명	구 간	연장(km) (서울시계)	사업기간	총사업비(백만원) (서울시부담액)	주요현황
계	3개 노선	66.5 (13.8)		4,395,818 (710,968)
경의선	용산~문산	48.6 (10.8)	'96~'16	2,443,158 (258,772)	□’14.12.27. 전구간 개통 □효창역 공사중('16.4.30 개통예정)
경춘선	망우~금곡	17.9 (3.0)	'97~'15	620,450 (43,796)	□'12.12 신내역 개통 □6호선 환승역 형식 이견으로 장기화(단선 /복선) ※ 신내 복합환승시설 용역 추진(’15.8~)
진접선 (4호선연장)	당고개 ~ 진접	14.8 (2.07)	'15~'19	1,332,210 (408,400)	□ 사업시행 : 본선(국토부), 차량기지(서울시) □’14.11.26. 본선구간 기공식 □’14.12.12. 차량기지 이전사업 추진계획 수립 □’15.5~ 차량기지 이전사업 설계 추진중(‘16.10.완료) □’15.6 : 본선구간 공사 착공 * 공정률 : 8%(11월기준)

❚ 국가시행 - 실시계획 승인 단계 중 (2개 노선 13.75km)

노선명

구  간

연장(km)

(서울시계)

사업

기간

총사업비(백만원)

(서울시부담액)

주요현황

계

2개 노선

26.12

(13.75)

3,032,100

(195,280)

신분당선

강남~용산

7.8

(7.8)

'11~'19

1,312,800

(145,200)

□수요예측 재조사 진행완료(’14.9.28)

- 협약대비 16.6% 감소(사업추진 가능범위)

□개발부담금 3,300억원에 대한 분담비율 합의

- 국토부와 기재부 합의(’15.12) : 국비 7, 지방 3

□’16.하반기 실시계획 승인 후 착공 예정

- 강남~신사 구간 우선 시행(2.6km, 6,829억원)

대곡~소사

대곡~소사

18.32

(5.95)

‘16~‘23

제 1안(5년)

1,571,789

(45,700)

제 2안(24년)

2,224,100

(68,900 이상)

□ 민간사업자와 협약체결(’15.12월)

□ 사업비 분담 시기 및 금액 관련 협의중

❚ 국가시행 - 기본 및 실시설계 중 (1노선 39.5km)

노 선 명	연장 구간	연장 (km)	총사업비 (억원)	추 진 단 계	주 요 현 황
수도권광역 급행철도	삼성 ~ 동탄	39.5	15,547	- ’15.3.19 :기본계획 고시 - ’15.7 : 2~5공구 입찰공고(TK)	□수서~동탄 구간은 고속철도 선로 공용 ※ 공용구간 공정률 : 67% ※ ※사업비 분담방안 추가협의 진행(시↔경기도) □영동대로 관련 1공구 입찰공고 보류

❚ 국가시행 - 기본계획 수립 중 (2개 노선 88.8km)

노 선 명	연장 구간	연장 (km)	총사업비 (억원)	추진단계	주 요 현 황
GTX-A -B -C	A일산~삼성 B송도~청량리 C의정부~금정	A:36.4 B:48.7 C:45.8 계130.9	A:30,639 B:46,038 C:41,552 계118,229	- ’14.3 : 예비타당성조사 완료(기재부) □B/C : A노선1.33, B노선0.33 C노선0.66 - ’14.5 : 기본계획 수립 용역 발주 - ’16.6 : 기본계획 수립 용역 완료예정	□A노선 기본계획 수립 및 민자적격성 조사(‘16.6) □B노선 재기획,기존 계획 보완 검토중(‘16.6) □C노선 KTX 노선공유 방안 예타진행중 □용역기간 중 세부협의 및 의견제시 ※ 신분당선 서북부연장과 GTX-A노선 연계 방안 제안(GTX-A노선변경 검토)
신안산선	안산~서울역 1단계:안산~여의도 2단계:여의도~서울역	49.4 (서울시계 :17.97)	47,241 (미정)	-기본･실시 설계완료('13.2) -’15.8.17사업추진방식 결정(BTO-rs) -시설사업기본계획 수립중(국토부)	□2단계로 구분하여 추진 ※ 1단계:안산~여의도 / 2단계:여의도~서울역 □’17년 1단계구간 착공 예정 □’18년 2단계구간 타당성 분석

❚ 지자체시행 - 공사중 (1개 노선 7.7km)

노선명	구 간	연장(km) (서울시계)	사업기간	총사업비(백만원) (서울시부담액)	주요현황
계	1개 노선	7.7 (1.1)	'15~‘20	990,900 (175,900)
하 남 선 (5호선연장)	상일 ~ 검단산	7.7 (1.1)	'15~‘20	990,900 (175,900)	□ 강일역~시·도경계 서울시 시행 - ’15. 3월 착공 ※ 공정률 : 1공구 1% 1-2공구 2% □ 시·도경계~풍산역 경기도 시행 ※ SH강일1,2지구 부당이득금반환 소송 제기(2014.2.14.) 진행중 - 사건번호 : 2014가합 505296 - 원고 : 김승옥 외 544명 - 피고 : 서울특별시 외 23명

❚ 지자체시행 - 기본 및 실시설계 추진중 (1개 노선 12.9km)

노 선 명	연장 구간	연장 (km)	총사업비 (억원)	추진단계	주 요 현 황
계	1개 노선	12.9	12,806
별 내 선 (8호선연장)	암사 ~ 별내	12.9	12,806	- ’06.10 : 예비타당성조사완료 □B/C 0.91, AHP 0.508 - ’11. 8 : 기본계획(안) 국토부 송부(경기도) □B/C 1.17, AHP 0.508 □시행주체 이견으로 국토부 미고시 - ’13. 11~’14.7 : 기본계획 보완용역 - ’14.12 : 기본계획 및 총사업비 협의 완료 - ’14.12 : 기복계획고시(국토부) - ’15.6 : 사업추진계획 방침 - ’15.8 : 기본및실시설계 착수(16.12)	□ 강동구 건의노선 추가검토 - 강동구 건의노선 반영 시 총사업비 57.6% 증가로 미반영 □ ’16.12월 공사계약 예정 □ ’17.3월 공사착공 예정

❚ 시행주체 미정 – 구상단계 (7개 노선 134.4km)

노 선 명	연장 구간	연장 (km)	총사업비 (억원)	추진단계	주 요 현 황
계	7개 노선	133.6	118,641
구리남양주선 (6호선연장)	신내 ~ 진건	4.0	3,709	- ’15.7 : 예비타당성조사 재신청 (경기도) 예비타당성 조사중(’16.1.18~7.17)	- 별내선 BN4정거장 연계 방안으로 재신청(경기도)
의정부양주선 (7호선연장)	도봉산 ~ 고읍	15.0	7,155	- ’10.12 : 예비타당성조사 완료 □B/C 0.60, AHP 0.310 - ’12.4 : 예비타당성 재조사 완료 □B/C 0.81, AHP 0.413 - ’13.6.~ 예비타당성 조사 진행(3차) - ’15.6. 광역철도 신규 지정 심의 - ’15.8 광역철도 신규 지정 확정	- 예비타당성 재조사 진행중 - ’15.6월 제24회 광역교통정책실무위원회에서 광역철도 신규 지정 심의
신분당선 서북부연장	동빙고 ~ 삼송	19.4	22,613	- ’13.6 : 도시철도기본계획 재정비 용역을 통해 검토완료 - ’13.12 : 정부에 공식 건의 - ’14.5 : 용역 발주(국토부) □수도권 광역급행철도 기본계획 용역 ※ 지자체 건의노선에 대한 검토 병행 - ’14.7.2 : 국가철도망 반영 건의 □ ’14.8.25 : 원종홍대입구선 보완자료 제출 □ ’14.12.8 : 위례과천선 보완 및 대안 제출	- 국가철도망 구축계획에 반영 필요 사업 - 국가시행 광역철도사업으로 추진될 수 있도록 중앙정부와 적극 협의추진 - 신분당선 서북부연장 : GTX-A 노선과 연계방안 추진 ’16년 상반기 국가철도망 확정 예정
남부광역 급행철도	당아래 ~ 잠실	30.4	32,886
KTX 동북부연장	수서 ~ 의정부	31.7	23,417
위례과천선	위례~선바위	16.8	13,261
원종홍대입구	원종~홍대입구	16.3	15,600

ㅇ 주요 간선 및 광역도로 사업현황

사업명	규 모	기 간	비고(사업목적)
강남순환도시고속도로 건설	6~8차로, 22.9km (민자 12.4km)	'97 ~ '19	강남지역의 간선 도로망 구축
강변북로(성산~반포대교) 확장	8→12차로, 11.6km	'09~'20 이후	강변북로 교통정체 해소
신림~봉천터널 건설	4차로, 5.6km	'09 ~ '20	남부순환로 상습정체 해소
사가정길~암사동간 도로 개설(암사대교 건설)	4~6차로, 2.74km	'01 ~ '16	동부지역의 체계적인 도로망 구축
동부간선도로 (녹천교~의정부시계) 확장	4→6~7차로, 5.45km	'07 ~ '19	서울 동북부지역 교통여건 개선
KTX 수서역 등 주변 도로 개선(밤고개길 확장공사 등)	4→6~8차로, 8.2km	'14 ~'18	KTX 수서역 주변 도로개선대책 수립
국회대로 지하차도 및 상부공원화	40~55m, 7.6km	'13 ~ '23	강서·양천 지역간 단절과 상습정체 해소
월드컵대교 건설	6차로, 1.98km	'10 ~ '20	성산대교 교통 정체 해소
서부간선지하도로 건설	4차로, 10.33km	'09 ~ '20	서부간선도로 상습 정체 해소
서초역~방배로간 도로 개설	6차로, 1.28km	'07 ~ '19	서초대로 단절구간 연결
선사로~고덕지구간 도로 확장	8~10→28~35m 3.72km	'09 ~ '17	동부지역의 교통량 증가에 대비한 도로 확장
동부간선도로 (월계1교~녹천교) 확장	4→6~7차로, 1.4km	'07. ~ '19.	병목 상습정체 해소
방화대교 남단 접속도로 건설	5.7∼18m, 3.02km	'05 ~ '16.	방화동 지역 교통난 해소
서울제물포터널 건설	4차로, 7.53km	'10 ~ '20	제뭎포길 상습 정체 해소
천호대로(광나루역) 확장	6→10차로, 0.9km	'10 ~ '17	천호대로 병목구간 확장