붙임 1.

부  의  안

1. 제안부서 : 건설안전사업본부 건설사업부

2. 제안근거

￮ 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

- 4. 운영절차 / 4-1설계변경심사위원회 / 가. 심사･의결대상

3. 제안사유

￮ 항동공공주택지구 2단지 아파트 건설공사 중 파일공사 항타공법 실정보고에 따른 설계변경 적정성 심사

- 요청금액 (1,211,000천원) : 파일공사 금액(1,234,700천원)의 0.5%(6,174천원) 이상이므로 설계변경 심사대상

4. 심사 ․ 의결 요구사항

￮ 설계변경 사유 (타당성)

- 항동 2단지 206동 지반조사보고서 주상도 검토 결과, 기존 D.R.A.공법으로는 연암맥 천공이 불가하여 SDA+T4공법으로 변경 시공하여 구조물의 품질 및 안전성 확보 필요

항 목	단가 조사방법	신규단가 협의율
순수신규	- SH자원단가 SH 최근발주단가	협의낙찰율 (87.472%)

￮ 단가적용 기준

￮ 신규비목에 대한 적용낙찰율

- 지방계약법 시행령 제74조 규정에 의거 계약상대자의 책임이 없는 사유로 인한 설계변경 사항으로 (100+계약낙찰률)/2 인 87.472% 적용

5. 참고사항 :

- 별첨 설계변경위원회 심사자료 참조

2017년  01월  16일

제 안 자   백 길 옥 □

설계변경 심사위원회 소집통보(건축)

수  신 : 건축설계처장, 건축기술부장, 계약심사부장, 건축설계부장,

건축공사부장, 재정관리부장, 예산자금부장

다음과 같이 위원회 소집을 통보합니다.

1. 일  시 : 2017.01.18.(수) 10:00

2. 장  소 : 10층 건설안전사업본부 회의실

3. 의  안

제 안 번 호	제 안 제 목	제 안 내 용	제 안 부 서
제2016-5호 (건축)	항동 2단지 파일공사 항타공법 변경에 대한 설계변경 적정성 심사	설계변경의 적정성 신규단가의 적정성 협의낙찰율 결정: (계약낙찰율+100%)/2	건설안전 사업본부 건설사업부

4. 세부내용 : “별첨” 설계변경심사위원회 심사자료

2017년   01월  18일

위원장   건설안전사업본부장   장 달 수   □

건축분야 설계변경 심사위원회 심사위원 명단

구 분	심 사 위 원			비 고
	본 부	직 위	성 명
위 원 장	건설안전사업본부	건설안전사업본부장	장 달 수
부위원장	건설안전사업본부	건축설계처장	이 우 필
위 원	건설안전사업본부	건축기술부장	조 대 원
위 원	기획경영본부	계약심사부(TF)장	곽 홍 준
위 원	건설안전사업본부	건축설계부장	안 병 기
위 원	건설안전사업본부	건축공사부장	한 일 현
위 원	기획경영본부	재정관리부장	장 한 수
위 원	기획경영본부	예산자금부장	조 한 보