하자제로 품질만족 불신제로 고객감동

	서 울 주 택 도 시 공 사

수신자	내부결재
(경유)

제목	설계변경 심사위원회 개최 결과 보고

1. 건축공사부-280(2017.01.13.)호와 관련입니다.

2.「오금 보금자리주택지구 1,2단지 아파트 건설공사」의 단지 내 공용부위 마감변경에 따른 설계변경 심사위원회 개최 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 심사위원회 개최 결과 (붙임 결의서 참조)

1) 안    건 : 오금지구 아파트 단지 내 공용부위 마감변경에 따른 설계변경

2) 일    시 : 2017.1.16. (월) 17:00

3) 의결사항

·복도천정 배관커버 설치 : 원안대로 의결함

·필로티 하부 천정재 변경 : 원안대로 의결함

·동 출입구 경사로 바닥마감 변경 : 원안대로 의결함

·쓰레기집적소 바닥마감 변경 : 원안대로 의결함

·지하저수조 벽, 천정마감 변경 : 원안대로 의결함

나. 설계변경금액 현황                             (단위 : 천원, 제잡비 포함)

구 분	당 초(A)	변 경(B)	증 감(B-A)	비 고
직접공사비	40,119	92,977	52,858	엘리베이터홀 천정 마감 변경건 제외
간접공사비	9,978	22,160	12,181
합 계	50,098	115,138	65,040

다. 행정사항

- 엘리베이터홀 기준층 천정마감 변경 건은 마감재질 재검토 후 조치

- 기타 의결된 사항에 대하여 감리단에 승인통보하고 계약변경 절차 이행

붙임  1. 설계변경 심사위원회 개최보고

2. 결의서.  끝.

부 원						파트장				건축공사부장			건설사업처장
		임승룡						배양수			한일현			김영수
건설안전사업본부장					01/19
		장달수
협조자

시행			건축공사부-399				(2017.01.19)			접수				()
방침번호			본부장 방침 제25호
우	135-988			서울특별시 강남구 개포로 621								/	www.i-sh.co.kr
전화		02-3410-8935			전송	02-3410-8995		/	plush9@i-sh.co.kr					/	공개