문서번호	인재기획과-1370
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		인재행정팀장	인재기획과장
안주희		오세우	01/31 원권식
협조

인재기획과 및 부속시설 재배치 설계용역 시행계획

2017. 1

인재개발원

(인재기획과)

인재기획과 및 부속시설 재배치 설계용역 시행계획

인재기획과 및 부속시설 재배치 계획에 따른 시설 이전 및 환경개선공사 설계용역 시행계획을 보고드림

□ 추진근거

○ 인재기획과 및 부속시설 재배치 추진계획(인재기획과-1271, ‘17.1.25)

□ 용역 시행계획

○ 용 역 명 : 인재기획과 및 부속시설 재배치 설계용역

○ 기    간 : 착수일로부터 50일

- 실시설계 30일, 사후설계관리 20일

○ 용 역 비 : 15,646,000원(부가세 포함)

- 산정방법 : ‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 (국토해양부 고시 제2015-911호)’에 따른 공사비요율방식으로 산정

- 세부내역 : 기본업무대가(공사비*요율), 추가업무대가(사후설계관리, 3D모델링)

○ 과업대상

구 분	인재기획과 사무실	부속시설
위 치	서울시 인재개발원 본관(서초구 남부순환로 340길 58)
규 모	지상3층, 319㎡	지상1층, 188㎡
비 고	업무공간 조성	의무실, 북카페, 역사관 조성

○ 과업내용

- 사무공간 및 부속시설 이전 디자인 설계

- 실시 설계도서 및 공사 시방서, 설계설명서 등 작성

- 사후설계관리업무 및 3D모델링 업무 수행 등

□ 추진방법

○ 계약방법 : 수의계약

※ 추정가격 2천만원 이하 용역으로「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 1항 5호에 의거 수의계약에 의할 수 있는 경우에 해당

○ 예산과목

-  인재기획과, 인재양성 및 시험관리, 교육시설 유지 및 장비확충, 인재원청사 보수‧보강, 시설비

□ 향후계획

○ 기술용역 타당성 심사의뢰(기술심사담당관) : ’17. 1월

○ 용역계약 및 시행 : ’17. 2월

○ 준공 및 대가지급 : ’17. 3월

붙임 1. 과업내용서 1부.

2. 용역설계서 1부. 끝.