문서번호	시설과-559
결재일자	2017.2.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
백강석	공헌구	김명용	02/01 송천헌
협 조
	주무관		조대복

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)』

준공기한 연기검토 보고

2017년 2월

서 울 대 공 원

(시  설  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)』

준공기한 연기검토 보고

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)』시행중 동물원내 Al발생으로 공사가 중지됨에 따라 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울대공원 잡용수배관 교체공사(2단계)

공사기간 : 2016. 9. 1 ~ 2017. 2. 4

시 공 사 : ****************

도 급 액 : **********

주요 공사내용

- 잡용수배관 교체 1.47㎞ 및 기존 배관 철거 3.43㎞

- 잡용수용 펌프 교체 : 제1펌프장(4대) 및 제2펌프장(부스터펌프 1조)

- 펌프 자동제어장치 설치 : 1식

Ⅱ		준공기한 연기

연기사유 : 동물원내 AI발생으로 인한 공사중지로 절대공기 부족

연기기한

- 당초 : 2016. 9.1~ 2017. 2.4

- 변경 : 2016. 9.1~ 2017. 3.21(45일간 연기)

준공연기 귀책사유 : 서울대공원

지체상환금 부과 여부 : 미부과

Ш		행정사항

준공기한 연기에 따른 변경 계약 : 총무과

- 계약기간(공사기간) 변경

· 변경전 : 2017. 2. 4.

· 변경후 : 2017. 3.21(45일 연장).  끝.