1		창작연극 지원시설 건립

젠트리피케이션 대책 일환으로 대학로 소극장 및 창작극단의 위기를 해소하고

창작연극 활성화 및 오프대학로 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 성북구 동소문동 1가 1-4 외 1필지(부지 2,760.5㎡)

○ 기    간 : 2015 ~ 2020년

○ 규    모 : 연면적 8,056.73㎡(지하2/지상4층)

○ 총사업비 : 25,276백만원

○ 사업내용 : 창작연극계 보호 및 연극 공연문화 활성화

○ 추진단계

시투자심사	▸	중앙투자심사 및 공유재산 심의	▸	설계공모	▸	기본 및 실시설계	▸	공사시행
(‘16.11)		(‘17.1~5)		(‘17.6~9)		(‘17.10~’18.7)		(‘18.8~’20.12)

□ 그간 추진경과 및 향후일정

○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역                    ‘15.12 ~ ’16. 6.

○ 서울시 투자심사(조건부)                              ‘16. 11.

- 수요예측에 대한 검토 후 공간배치, 시설계획 및 공간구성에 대한 연극인         의견 수렴 후 추진

※ 공연장의 연간 공연장 가동현황, 공연실적, 설문조사 등을 통하여 검토

전문가, 관계자 회의 개최(‘16.12) 및 현장조사(‘16.12월) 반영

- 향후, 공원이 없어지는 부분에 대한 대체 공원조성 민원이 없도록 추진

※ 본 건립부지 북쪽에 가로공원(약700㎡) 조성으로 기존 공원 대체 가능

○ 공유재산(심의)관리계획 수립 및 구유지 사용 무상동의  ‘17. 1. ~ 5.

○ 설계공모 및 설계용역 시행                           ‘17. 6. ~ ’18. 7.

○ 공사시행                                             ‘18. 8. ~ ’20.12.