문서번호	문화시설과-1107
결재일자	2017.2.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	문화시설2팀장	문화시설과장	문화시설추진단장
전지연	이영미	오희선	02/07 이혜경

세종문화회관 블랙박스극장 조성사업 연장계획

2017.2.

문화시설추진단

(문화시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

세종문화회관「블랙박스극장」조성사업 연장계획

미완성 상태로 폐쇄된 세종문화회관 예술동 지하공간에 블랙박스극장 조성과 관련하여 지하철역사 연결통로에 필요한 기술자문 등 제반절차 이행에 따라 기간을 연장하여 추진하고자 함.

Ⅰ		추진근거 및 경위

□ 추진근거

○ 문화예술진흥법 제5조(문화예술 공간의 설치 권장)

○ 서울특별시 재단법인 세종문화회관 설립·운영 조례 제4조(법인의 사업)

○ 세종문화회관 「블랙박스극장」 조성 계획(문화정책과-1627, 2016.02.02.)

○ (재)세종문화회관「블랙박스극장」조성 사업일정 조정안 제출(2017.01.11.)

□ 그간 추진경위

○ ’08. 11.	세종문화회관 지하공간리모델링 및 옥상 증측계획

○ ’09.  2.	세종문화회관 지하공간 리모델링 및 예술동 증축 변경계획

⇒ 실험극장을 포함하는 사업계획 변경 확정

○ ’10. 11.	세종문화회관 지하공간 리모델링 및 예술동 증축 변경계획

⇒ 실험극장을 제외한 지상층 위주 변경추진(市 재정여건 악화)

○ ’12. 12.	예술동 증축공사 준공(실험극장 내부 및 설비 제외)

○ ’15. 8.~9.	블랙박스극장 조성 타당성용역 실시 및 시 투자심사(적정)

○ ’16. 1.~2.	블랙박스극장 조성 사업계획서 제출 및 민간대행계약 체결(서울시 ↔ 세종문화회관)

○ ’16. 4.~5.	기술(설계)용역 타당성 심사 및 설계용역 발주심의(건설기술심의위원회)

○ ’16. 6.	설계현상공모 및 설계자 선정

○ ’16. 7.~12. 기본 및 실시설계(제이유건축사사무소)

○ ’16.11.~12.	종로구 도시건축공동위원회 및 건축위원회 건축심의(적정)

Ⅱ		당초 사업 개요

□ 세종문화회관 「블랙박스극장」 조성

○ 위    치 : 종로구 세종대로 175

○ 규    모 : 300석 내외 (30m×15m, H:10m)

○ 사업기간 : ’16. 1. ~ ’17. 7.

○ 사업내용

- 무대·객석·조정실·분장실·대기실 조성, 무대장비 및 건축설비 구축

- 다양한 형태로 변형될 수 있는 전위적이고 실험적인 무대 가변형 극장 조성

- 연극, 무용, 전통공연 등 장르의 장벽 없는 창작 실연 무대로 활용

※ 사용유보공간 현황

• 위 치 : 예술동가동 지하 1~3층

• 공 간 : W15m×L30m×H10m

• 면 적 : 1,395㎡ (극장 490㎡,

분장실등 부속공간 455㎡, B3 피트 450㎡)

□ 지하철역 연결통로 신설

○ 위    치 : 종로구 세종로 81-3

○ 주요시설 : 연결통로, 에스컬레이터, 선큰 캐노피

○ 사업기간 : ’16. 1. ~ ’17. 7.

○ 주요내용 : 세종문화회관 예술의 정원 ~ 5호선 광화문역 지하통로 연결

□ 추진방법 : (재)세종문화회관과 대행계약 체결 추진

□ 총사업비 : 7,574백만원

○ 연차별 집행(투자)계획

(단위 : 천원)

계	2016년	2017년	비 고
7,574,000	2,000,000	5,574,000	설계, 감리, 공사, 부대비

Ⅲ		변경 계획

□ 사업기간 연장

○ 추진대상 : (재)세종문화회관

○ 연장기간 : 당초 2017.7.31. → 연장 2017.12.31.

○ 연장사유

- 기존건축물 증축 완화 심의 및 지하 연결통로 조성에 따른 관계부서(도시철도공사) 협의절차 지연

- 실시설계 기술검토 및 추가구조 검토에 따른 자문(안) 반영 설계기간 연장

□ 대행계약서 변경

해당 조문	당 초	변 경	비 고
제2조 (사업내역)	3. 다.공사준공 : 2017년 7월 31일	3. 다. 공사준공 : 2017년 12월 31일
제4조 (사업기한)	① “재단”은 이 사업을 2017년 7월 31일까지 완료한다.	① “재단”은 이 사업을 2017년 12월 31일까지 완료한다.

□ 사업비 교부

○ 교부금액 : 총5,574,000천원

○ 교부방법 :「대행계약협약서」에 의거 사업비 교부

○ 교부시기 : ’17. 2월중

Ⅳ		향후 일정

○ ’17. 2.	대행(변경) 계약 체결 및 시공사 선정

○ ’17. 3.	도시철도공사 협약 체결 및 공사착공

○ ’17. 10.~11.  준공검사 및 시험운영

○ ’17. 12.	개관(프로그램 기획 및 운영)

붙임 : 세종문화회관 블랙박스극장 조성 대행계약서 1부.