문서번호		안전치수과-2273		주무관		하수관리팀장	안전치수과장		건설안전교통국장		부구청장
결재일자		2017.2.10.
				강선덕		장현준	함명수		김희동		전결 02/10 오해영
공개여부		부분공개(5)
				협 조
보도여부
	『하수관로의 효율적 유지관리 및 수해 예방을 위한』 2017년도 하수관로 준설(세정) 시행 계획
2017.2.9.
강 북 구 (안전치수과)

하수관로의 효율적 유지관리 및 수해 예방을 위한

2017년도 하수관로 준설(세정) 시행 계획

최근 급증하고 있는 하수악취 불편 민원과 배수불량 및 주택침수의 주요원인으로 지목되고 있는 하수관로 내부에 퇴적된 각종 토사, 협잡물, 쓰레기 등을 제거하기 위해 하수관로 준설 및 세정을 시행하여 수해를 예방하고 하수악취 요인을 제거함으로써 쾌적한 주거환경 조성에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		기본방향

□ 정확한 준설물량 조사

○ 관내 전체 하수관로에 대하여 직원과 공무직 합동으로 육안 및 준설기 연결대를 이용하여 하수관내 토사퇴적여부 및 준설량을 정확히 조사

□ 우기 전 중점준설

○ 관내 하수관로(간선도로 및 간선 접속도로) 및 하수시설물의 토사퇴적여부를 조사하여 저지대, 취약지역 등의 중점 준설대상 관로는 우기 전 준설 완료

□ 수해취약지역 중점준설

○ 집중강우 중점관리지역(송천동 324 ~ 379번지 일대, L=4,300m)

○ 집중호우 시 피해발생 지역 및 침수우려 지역

○ 하천변 및 빗물펌프장 유입관로

○ 저지대 및 상습 토사퇴적지역

○ 준설 민원지역

□ 하수악취 취약지역 하수관로 세정작업 시행계획

○ 하수악취 발생 주요 원인 중 하나인 하수관 내부에 퇴적된 음식물 등 부패물질 제거를 위해 주택가, 전통시장, 음식점 밀집지역 등 상습적으로 제기되는 악취민원 취약지역에 대하여 연 2회 이상 세정작업 시행

□ 빗물받이 및 침사지 연중관리

○ 하수관로 내 토사 및 협잡물의 주요 유입원인 빗물받이 ․ 침사지   관리 철저

□ 이면도로 빗물받이 준설 기간제 근로자 운용

○ 이면도로 빗물받이 준설은 동주민센터에서 담당하고 있으나 가용인력 부족 등으로 적정시행이 어려워 우기 전(4~6월) 빗물받이 준설 기간제 근로자를 채용 및 운용하여 우기 전 빗물받이 집중 준설시행

□ 준설토 반출입 확인 철저

○ 준설토 중간집하장 수시 순찰로 준설토 반출입의 투명성 확보와 함께 주변 환경 청결 유지

(강북구 오현적환장에서 1차 계근 후 반출, 처리업체에서 2차 계근)

Ⅱ		하수관로 토사 퇴적량 및 세정구간 조사

□ 조사기간: 2017. 01. 04. ∼ 02. 05.

□ 조사방법: 직원 및 공무직 조편성, 준설량 및 세정 필요구간 조사

□ 조사대상: 관내 하수관로 333㎞ 및 부대시설

□ 조사결과 추정량

구 분		하천 및 하수도	퇴적량(㎥)	비 고
2017년 준설 조사결과 추정량		126,250m	2,025
흡입,기계	우기 전 준설 예정량	20,000m	1,420	우기전 70%
	우기 후 준설 예정량	8,670m	605
세정	하수관로 세정 예정량	97,580m	-

□ 악취민원 현황

연 도	민원 유형	민원접수 (건)	처리결과	비 고
2015년	하수도, 빗물받이악취	234	악취저감기 설치 및 하수관 세정
2016년	하수도, 빗물받이악취	242	악취저감기 설치 및 하수관 세정

Ⅲ		준설현황 및 시비 집행계획

□ 하수시설물 현황

원형관 (m)	사각형거 (m)	개 거 (m)	U형 측구 (m)	맨 홀 (개소)	빗물받이 (개소)	침사지 (개소)	횡단하수거 (개소)
298,262	34,174	645	502	10,394	14,752	139	1,082

□ 투입인력 및 장비

구 분	직 영		민 영
	공무직	장 비	인 력	장 비
장비/인력현황	8명/일	바켓준설기 4조	4명/일	흡입․세정차 암거준설장비

□ 사업예산

(단위: 천원)

구분	계	공무직(직영)		준설공사(민영)	이면도로 빗물받이 준설 기간제근로자	비 고
		장비유지비	급여(18명)	하수도준설 시설비
합 계	2,565,198	49,320	1,266,540	1,174,000	75,338
구비	2,191,198	49,320	1,266,540	800,000	75,338
시비	374,000			374,000

Ⅳ		세부추진계획

□ 준설시행

○ 준설기간

- 직    영: 2017. 03. ∼ 2017. 12. (연중 계속시행)

- 민    영: 2017. 03. ∼ 2017. 11. (연중 계속시행)

○ 시행방법

- 동별 준설대상을 기준으로 우기전 70%, 우기후 30% 목표로 집중준설

- 안전치수과: 하수관로, 간선도로 빗물받이, 침사지, 복개하천 등

․ 흡입준설: 간선도로 하수관로 및 흡입차 접근가능 도로 (민영)

․ 기계준설: 복개하천 및 하수암거 준설 (민영)

․ 빗물받이: 간선도로 및 간선 접속도로 빗물받이 (민영)

․ 하수관세정: 관경 10%미만 퇴적구간 및 주택가, 전통시장, 음식점 밀집지역 등 악취 민원 취약지역 (민영)

․ 바켓준설: 이면도로 하수관로 및 저지대 침수우려 지역 (공무직)

- 동 주민센터: 이면도로 빗물받이 준설(동 주민센터 불가 시 공무직 협조)

․ 2017년부터 동 주민센터 가용인력 부족 등을 보완하기 위해 우기 전 빗물받이 준설 기간제 근로자를 채용 및 운용(4~6월)하여 우기 전 집중적으로 빗물받이 준설시행 예정

○ 준설량 확인 및 감독

- 흡입준설은 관경별, 퇴적 깊이별로 구분하여 확인된 연장에 의거  계근표에 의한 정산

- 인력 및 바켓준설은 실 준설량을 확인하여 계근표에 의한 정산

- CCTV카메라 촬영은 부설시기가 오래된 노후관 및 저지대 배수불량 지역의 하수관을 대상으로 별도 지정하여 준설작업지시서에 포함 지시하며, 침하․파손된 하수관과 관로내 유수장애시설물은 하수관로 정비계획 반영 및 유관기관에 이설 조치

- 준설토 반출입 확인철저 → 반출시 담당자 현장 확인

- 암거준설 시 장래 이용 가능토록 필요지역 장비투입구 설치

○ 준설토 처리방법

- 직영 및 민영준설 작업 시 발생하는 준설토에 대하여는 준설토 폐기물 처리용역 별도 발주

□ 2017년 하수도 준설(세정)계획량

○ 총  괄

구 분		계		우기전		우기후		비고
		연장(m) / 개소	준설량(㎥)	연장(m) / 개소	준설량(㎥)	연장(m) / 개소	준설량(㎥)
총 계	계		2,195		1,531		664
	하수관로	126,250m	2,025	88,360m	1,400	37,890m	625
	빗물/침사지	23,070개소	170	17,270개소	131	5,800개소	39
원형관로 및 암거	소계	126,250	2,025	88,360	1,400	37,890	625
	직영	12,910	325	9,030	210	3,880	115
	민영	15,760	1,700	11,030	1,190	4,730	510	흡입 /기계
		97,580	-	68,300	-	29,280	-	세정
빗물받이 (개소)	소계	23,000	150	17,200	111	5,800	39
	직영	7,000	40	6,000	34	1,000	6	기간제근로자포함
	민영	16,000	110	11,200	77	4,800	33
침사지 (개소)	소계	70	20	70	20
	직영	70	20	70	20

○ 공종별 준설계획

구분	바켓준설		흡입준설 및 세정		암거준설				빗물받이 및 침사지		비고
					기계		인력
	연장 (m)	준설량 (㎥)	연장 (m)	준설량 (㎥)	연장 (m)	준설량 (㎥)	연장 (m)	준설량 (㎥)	개소	준설량 (㎥)
계	12,910	325	111,620	943	1,700	754	20	2	23,070	170
직영	12,910	325	-	-	-	-	-	-	7,000	40	빗물받이
									70	20	침사지
민영	-	-	14,040	943	1,700	754	20	2	16,000	110	흡입/ 기계
	-	-	97,580	-							세정

붙임  1. 하수도 준설물량 조사표 1부.

2. 하수도 준설 계획도 1부.

3. 강북구 중점관리 지역 위치도 1부.

4. 중점 준설(세정) 대상지역 1부.  끝.