투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	월드컵터널 LED등 교체공사 준공기한 연기의뢰

1. 기전과-1828호(2017.2.17.)와 관련입니다.

2. 월드컵터널 LED등 교체공사에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 월드컵터널 LED등 교체공사

나. 공사기간 : 2016.12.13. ~ 2017.4.20.

다. 계약업체 : 일화전기공사 대표 이학근

라. 계약금액 : 145,002,550원(금일억사천오백만이천오백오십원)

마. 준공기한 연기내용 : 당초 2017년 4월 20일에서 2017년 8월 31일까지 연기

바. 준공기한 연기사유 귀책소재 : 서부도로사업소

사. 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과

아. 준공기한 연기사유 : 노후된 조명등의 분전함 추가교체 검토, 조명등 결선도(회로도) 검토, 공사중 교통영향평가 검토 및 관급자재 조명등 납품기한 연기에 따른 공사 준공기한 연기

붙임  1. 준공기한(납품기한) 연기보고서(기전과-1828호) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	代최정화		서부도로사업소장	02/21 한동근
협조자	주무관	윤미란		관리단속과장	박종윤
시행	기전과-1965	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	300-8395	/전송	300-8410	/		/	대시민공개