서울특별시고시 제2017-65호

도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가 고시

1. 양주 별내지구 광역교통개선대책의 일환으로 서울특별시 노원구고시 제2011-61호(2011.12.8)로 도시계획시설(도로) 경미한 변경결정 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2015-53호(2015.02.26)로 실시계획인가 고시된 『남양주 별내지구 주변도로(서울시구간-화랑로) 확장 및 지하차도 설치공사』에 대하여 서울특별시공고 제2016-2404호(2016.12.29.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가를 위한 열람공고를 시행하였기에

2. 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제88조 및 시행령 제97조에 따라 실시계획 변경인가하며 같은법 제91조 및 시행령 제100조에 따라 이를 고시합니다.

2017년  3월  2일

서 울 특 별 시 장

가. 사업시행지의 위치 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-84 일원 (변경없음)

나. 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

○ 종 류 : 도시계획시설(도로) 사업

○ 명 칭 : 남양주 별내지구 주변도로(서울시구간-화랑로) 확장 및 지하차도 설치공사

다. 사업시행 규모 (변경없음)

○ 폭 38→42m, 연장 323m, 면적 18,215㎡

라. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경)

○ 성 명 : 한국토지주택공사장(LH공사장)

○ 주 소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 (정자동 217) (당 초)

경상남도 진주시 충의로 19(충무공동) (변 경)

마. 사업의 착수 및 준공 예정일 (변경)

○ 실시계획인가 고시일(2015.02.26) ~ 2016. 12. 31 (당 초)

○ 실시계획인가 고시일(2015.02.26) ~ 2017. 12. 31 (변 경)

바. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 붙임 (변경없음, 생략)

아. 기타 자세한 사항은 한국토지주택공사 서울지역본부 남양주사업단(☎031-528-5474) 또는 서울특별시 도로계획과 (☎02-2133-8087)로 문의하시기 바랍니다.