투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(교통정책과장)
(경유)
제목	시의원 요구자료 제출

1. 교통정책과-4966(’17. 3. 2.)호와 관련입니다.

2. 위 대호 관련 우리부 소관사항을 아래와 같이 제출합니다.

아     래

3. 각 년도별 추진실적 및 결과(차량)

1) 2009. 07. 24.: 1단계 구간 개통

○ 24편성(4량 1편성) 96량 운영

2) 2011. 10.     : 조기증차 48량 구매

○ 36편성(4량 1편성) 144량 운영

3) 2015. 03. 11.: 9호선 전동차 구매계획 수립(본부장 방침)

○ 조기증차 70량: 20량 조기투입(’16. 8.)+50량 정상시운전 중(’17. 2)

4) 2016. 08. 26.: 9호선 전동차 32량 구매 계획 수립(본부장 방침)

○ 3단계 개통 대비 32량 구매, 246량 운영(4량 12편성, 6량 33편성)

4. ’17년도 각 세부 사업별 설명서 및 개요, 추진계획(차량)

□ 70량 구매

○ 사업개요

- 사업근거: 행정1부시장 방침 제88호
지하철 9호선 혼잡도 개선 및 증차 계획{교통정책과-4810(’15. 3. 10.)}

- 구매수량: 70량(6량/9편성, 4량→6량 증결/8편성)

- 납품기한: 2017. 12. 31.

- 총사업비: 100,100백만원 (’17년 예산: 20,920백만원)

○ ’17년 추진계획(’17년말 목표 공정율: 100%)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
공 정 률	86.8%	92.5%	97.5%	100%
추진내용	- 증량 2량 8편성 반입	- 70량 전량 반입 완료	- 신호시험 및 초도차량 본선시운전 실시	- 70량 예비주행 완료 - 6량 3편성 운행 투입

○ 향후계획

- ’17. 02.: 6량 편성 차량 예비주행시험(5,000km) 완료

- ’17. 03. ~ 11월: 6량 편성 전동차 신호검증시험 및 본선시운전

- ’17. 11.: 철도종합시험운행(시설물 검증시험 및 영업시운전)

- ’17. 12.: 6량 3편성 본선 투입 운행

- ’18. 06.: 70량 전량 영업운행 투입

□ 32량 구매

○ 사업개요

- 구매대수: 32량(4량→6량 증결/16편성)

- 납품기한: 2018. 12. 31.

- 총사업비: 44,095백만원 (’17년 예산: 6,800백만원)

○ ’17년 추진계획(’17년말 목표 공정율: 42%)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
공 정 률	10.0%	20.0%	30.0%	42.0%
추진내용	- 도면 및 도서 작성	- 도면 및 도서 작성	- 초도차량 2량 제작 중	- 증결차량 2량 2편성 4량 반입

○ 향후계획

- ’17. 06.: 도면 작성 및 검토

- ’17. 12.: 초도차량 등 2편성 4량 반입

- ’18. 12.: 32량 반입

□ 24량 구매(예정)

○ 사업개요

- 구매대수: 24량(4량→6량 증결/12편성)

- 납품기한: 2018. 12. 31.

- 총사업비: 45,200백만원 ('17년 예산: 32,000백만원)

○ ’17년 추진계획(’17년말 목표 공정율: 30%)

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기
공 정 률	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%
추진내용	- 계획수립 및 구매발주	- 계약체결	- 전동차 기본 및 상세설계 협의 및 승인	- 차체,대차 자재 반입 및 가공 - 주요전장품 주문

○ 향후 계획

- ’17. 04.: 전동차 24량 구매 계획 수립 및 조달구매발주 의뢰

- ’17. 06.: 입찰제안서 평가 및 계약 체결

- ’17. 07.~09.: 전동차 기본 및 상세설계 협의 및 승인

- ’17. 10.~’18. 10.: 전동차 제작 및 차량기지 반입

- ’18. 12.: 전동차 시운전 및 납품완료

5. 3단계 구간 개통 관련 진행사항(차량)

1) 전동차 32량 구매 관련

○ ’17. 03.: 4량→6량 증결차량 변경 추진

○ ’17. 12.: 제작도면 설계 및 제작

○ ’18. 12.: 철도종합시험운행 및 전동차 투입

2) 전동차 24량 구매 방침 수립

○ 개요: 4량 12편성에 대한 잔여 6량화 위한 차량 구매

○ 추진계획

- ’17. 04.: 전동차 24량 구매 방침 수립

- ’17. 06.: 계약 체결

- ’18. 12.: 철도종합시험운행 및 전동차 투입.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	장재순		차량과장	강치석		도시철도설비부장	03/06 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-2814	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7288	/전송	02-772-7308	/		/	대시민공개