문서번호	급수운영과-5708
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관	급수운영과장		강서수도사업소장
김효경		이상무	김정수		03/07 이인걸
협 조
	시설관리과장			고신석
	주무관			노찬두
	주무관			김영일
	주무관			홍성철

2017년 수도계량기보호통

보온재 및 뚜껑 정비계획 보고

2017. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

2017년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획

보온재 및 뚜껑이 파손, 망실 되어 동파의 우려가 있는 수도계량기 보호통을 정비하여 동파를 최소화하기 위한 정비계획을 보고드림.

※관련근거 : 급수설비과-1787(2017. 3. 2.)

Ⅰ		사 업 현 황

□ 추진근거

❍ 행정2부시장 방침 제77호 (2013. 03.13)

“ 겨울철 대비 동파·동결 예방대책 추진”

❍ 급수설비과-1306호 (2016.2.5)

“2016년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비시행”

	개
	선

□ 총 사업개요(본부)

❍ 전수조사 : 13. 3 ~ 5월

❍ 사업기간 : 2013~2019년

❍ 사업목표 : 136,000개

❍ 사 업 비 : 51억원

※ 17년 8억원 : 보온재 5억, 뚜껑 3억

Ⅱ		2016년 추진실적

□ 보온재 및 뚜껑 정비

❍ 보온재 정비 : 3,318개 정비(목표량 3,300개) → 100%이상 달성

❍ 뚜껑 정비 : 609개 정비(목표량602개) → 100%이상 달성

❍ 사업비 : 127백만원(약100% 집행)

Ⅲ		2017년 정비 계획

□ 구 및 분기별 정비계획

❍ 구별 정비목표 및 예산

구분	계		수전 비율 (%)	보온재교체		뚜껑교체		비 고
	목표 (보온재+뚜껑) (개)	예산 (백만원)		목표 (개)	예산 (백만원)	목표 (개)	예산 (백만원)
계	2,567	90.4	100	1,965	62	602	28.4
구로구	564	20.2	22	432	14	132	6.2
양천구	848	29.4	33	648	20	200	9.4
강서구	1,155	40.8	45	885	28	270	12.8

※ 구별 보온재 및 뚜껑 정비 계획은 구별 (15,20mm)수전수 비율 적용

❍ 분기별 정비계획(안)

구분	계	1분기	2분기	3분기	4분기	비 고
계	2,567	200	900	900	567	보온재 및 뚜껑 합계
구로구	564	50	200	200	114
양천구	848	50	300	300	198
강서구	1,155	100	400	400	255

❍ 정비기간 : 2017. 3월 ~ 11월

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비 23203)

□ 정비 방향

❍ 수도계량기 보호통 뚜껑 및 보온재 정비대상 중 동파 우려가 많은 15, 20㎜ 우선 정비

-‘16년 12월 ~‘17년 2월까지 발생한 동파 수전 보온재 및 뚜껑 우선 정비(현장민원과 협조)

❍ 정비대상에 없더라도 파손 또는 망실 및 응달에 보호통이 위치해 동파 우려가 있는 보온재 및 뚜껑을 집중 정비

❍ 동절기 이전 정비 완료하여 동결/동파 예방 : 11월 까지 완료

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 급수공사 연간단가 계약업체에 작업지시

❍ 보온재는 급수공사 계약업체 별로 사급자재 시행 후 정산

❍ 매월 5일 보온재 정비 실적 본부 보고

❍ 협조사항(요금과, 현장민원과)

- 요금과 : 각지역별 수도계량기 검침원의 협조받아 파손 또는 망실 된 뚜껑 및 보온재 리스트 제출

(월2~3회 취합하여 붙임양식에 작성하여, 급수운영과 담당자 제출)

※ 맨홀식 계량기만 제출(벽체계량기는 제외)

- 현장민원과 : ‘16년 12월 ~‘17년 2월까지 발생한 동파 수전 내역 제출(붙임양식에 작성)

붙임 :‘17년 보호통 보온재 및 뚜껑 정비대상(양식) 1부. 끝.