《공 사 설 명 서》

1. 공 사 명: 강북구청사거리 주변 노후하수관로 정비공사(1구간)

2. 공사목적

주 ․ 야간 차량통행이 많은 강북구청 사거리 간선도로로 하부에 설치된 노후 사각형거 정밀점검 결과 콘크리트 균열, 철근부식, 재료분리 등 즉시 보수가 필요한 “D”등급으로 판정되어 구조물을 적기에 보수조치하여 내구성을 향상시키고 구조적 안전성을 확보하여 “도로함몰” 관련 안전사고를 예방코자 함.

3. 공사위치: 도봉로358 ~ 한천로989

4. 공사기간: 착공일로 부터 120일간

5. 공사개요

- 사각형거 하수관로 정비(▣3.5m×1.5m~▣5.0m×1.5m,   L=380m)

· 단면복구 : A=1,256.3㎡,   철근노출 단면복구 : A=344.8㎡

6. 공사금액

(단위 : 천원)

총공사비	도급비	관급비	이전비	비 고
498,977	483,285	-	15,692

7. 설계변경조건

- 다음과 같은 경우 설계변경을 할 수 있다.

가. 공사물량 증감 사유 발생에 의한 경우

나. 공법이 변경될 경우

다. 신규 공종이 추가되었을 경우

라. 설계상 계산착오가 있을 경우

마. 기타 정당한 사유가 발생될 경우

바. 설계도서와 현장의 여건이 상이 할 경우

8. 공사기간

- 본  공사기간은  착공일로부터 120일로하고  공사 기간 중 다음의 경우에

한하여 그 기간을 변경할 수 있다.

가. 공사 시행 중 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 하였을 경우

나. 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

다. 지장물의 철거 이설 등으로 공사 진행에 현저한 지장이 있을 때

라. 주민의 민원발생으로 공사가 중단될 경우

9. 하자기간: 준공검사일로부터 3년

10. 예정공정표

기간(일) 공종	공 사 기 간(착공일로부터)								비 고
	30일		60일		90일		120일
1. 보수공
2. 일반단면 복구공
3. 헌치부 시공
4. 부대공

11. 기타사항

가. 수급인은 공사 시행으로 인하여 인명 피해나 안전사고의 발생이 우려되는 장소가 있을 때에는 즉시 위험표시 및 적절한 응급조치를 수급인 부담으로 하고 감독관에게 보고하여야 하며, 안전사고로 인한 민ㆍ형사사건 등이 발생할 경우에는 관련되는 모든 책임을 진다.

나. 공사에 필요한 보안조치는 관계법규에 따라 만전을 기하고 필요한 제반시설을 갖추어야 한다.

다. 공사시공 중에는 인접해 있는 기존구조물 또는 교통시설물 등에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호 시설을 설치하여야 한다.

라. 토지의 붕괴, 낙반, 가설물이나 건축물의 파손 등 기타 공정 계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고발생의 우려가 있는 사항을 발견하였을 때에는 즉시 응급조치를 취하고 감독관에게 보고하여야 한다.

마. 당 공사현장 근로자에게는 소속 회사명이 표시된 조끼착용 및 명찰을 패용토록 하므로서 책임감 있고, 친절한 행동으로 구민고객으로부터 우리구 공사행정에 신뢰성 향상을 위하여 건설현장 근로자 실명제 시행에 만전을 기하여야 한다.

바. 본 공사의 설계물량은 현장 여건 및 공사 진행 상황에 따라 증ㆍ감 될 수 있다.

사. 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.

단, 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고 공사를 시행하여야 하며, 착공 후 3개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.