	주간 업무 현황 보고서(14.03.27)
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호
	버전	v 1.0	사업명	서울광장 기록수집 및 콘텐츠 개발 사업	작성부서	정보공개정책과

▪ 사 업 명	: 서울광장 기록수집 및 콘텐츠 개발 사업
▪ 사 업 부 서	: 정보공개정책과
▪ 추 진 기 간	: 2013.12.31 ~ 2014.07.28

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척률		비고
				계획	실적
1	사업관리	2013.12.31~2014.07.28		48.8%	48.8%
2	기록 수집	2013.12.31~2014.05.31		56.2%	56.2%
3	콘텐츠 개발	2013.12.31~2014.07.28		13.7%	13.7%
	계			39.5%	39.5%

주간 업무 현황 보고서

주간업무현황보고서

서울특별시                                                                       /2

진행단계	실행 및 통제						전체 진척률	%
단위과제	전주실적(2014.03.17 ~ 2014.03.21)			금주실적(2014.03.24 ~ 2014.03.28)			차주계획(2014.03.31 ~ 2014.04.04)
	내 용		진척률	내 용		진척률	내 용		진척률
	<사업관리> 9차 주간회의 일시: 2014.03.20(목) 14시		46.4%	<사업관리> 10차 주간회의 일시: 2014.03.27(목) 14시 결과보고서 작성 보고서 목차(안) 작성		48.8%	<사업관리> 11차 주간회의 일시: 2014.04.03(목) 14시		51.2%
	<기록수집> 1차 주제별 기록물 수집 단체 접촉 및 기록수집 참여연대(20일, 기록수집) 문화연대(17일, 기록수집) TBWA(실물 기록수집(예정)) 민주화실천가족운동협의회(재접촉) 뉴라이트전국연합(전화접촉 시도) (사단법인)국민행동본부(공문요청) 대한민국어버이연합(전화접촉 시도) 1차 수집기록 정리 기록물에 대한 목록 입력 사전 작업 분류 및 정리 작업을 위한 기록목록 작성 기록 정리 지침 마련 기술 요소 정의 및 정리 일괄 입력을 위한 입력 요소 추출 일괄 목록 입력을 위한 양식 및 지침 작성 해외사례조사 민간기록물 수집과 관련한 해외사례 수집 및 조사		51.3%	<기록수집> 1차 주제별 기록물 수집 단체 접촉 도시연대(26일, 전화접촉) 대한민국어버이연합(25일, 방문. 공문요청) 시정기록물 수집 서울시 촬영 항공사진 수집기록 정리 기록물에 대한 목록 입력 사전 작업 분류 및 정리 작업을 위한 기록목록 작성 수집 기록물의 기입 항목 파악 기존 분류체계 분석(시정사진) 기록 정리 지침 마련 기술 요소 정의 및 정리 일괄 입력을 위한 입력 요소 추출 일괄 목록 입력을 위한 양식 및 지침 작성 해외사례조사 민간기록물 수집과 관련한 해외사례 수집 및 조사		56.2%	<기록수집> 기록 분류 및 정리 전자기록 클라우드 업로드 실물기록 재정비 전자파일용 입력 항목 정비 기록 분류 트리 설정 기록 정리 입력폼 작성 기록 정리 기초 데이터 입력 기록 정리 지침 마련 기술 요소 정의 및 정리 일괄 입력을 위한 입력 요소 추출 일괄 목록 입력을 위한 양식 및 지침 작성 해외사례조사 민간기록물 수집과 관련한 해외사례 수집 및 조사		60.0%
	<콘텐츠 개발> 웹 콘텐츠 뷰어 플랫폼 U.I 개선작업 진행 각 매체별 작가와 기획회의 진행(영상 감독, 일러스트 작가, 웹 개발팀) 콘텐츠 뷰어 개발 중간 보고서 작성기록정보 서비스운영		12.6%	<콘텐츠 개발> 웹 콘텐츠 뷰어 플랫폼 U.I 개선작업 진행 각 매체별 작가와 기획회의 진행(영상 감독, 일러스트 작가, 웹 개발팀) 팩션 스토리텔링 작가 1차 컨텍		13.7%	<콘텐츠 개발> 웹 콘텐츠 뷰어 플랫폼 U.I 개선작업 진행 각 매체별 작가와 기획회의 진행(영상 감독, 일러스트 작가, 텍스트 작가, 웹 개발팀) 아카이브 검토		15.3%
미결업무 및 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항
산출물/ 별첨사항	일련번호	내 용
	1	서울광장 수집기록물 분류 및 정리방안