의  결  안

제 2017-4회 위 원 회
년 월 일	2017년 04월 07일	의안번호	제1호
의 제	내곡지구 내 도로시설물(교량) 콘크리트 중성화방지 검토

1. 제안부서 : 택지사업본부 택지조성부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

◦ 의안 제1호 - 「내곡지구 내 교량 콘크리트 중성화방지 검토」
내곡지구 도로시설물 관련 관할구청에 인수인계를 위한 합동점검 결과 교량 8개소에 대한 중성화방지 요청에 따른 도로시설물(교량) 중성화방지에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 374,451천원(부가세 포함)

4. 심사․의결사항 : 설계변경 타당성 등 원안가결

※ 신규품목에 대하여 계약심사부 기술심사 결과 별도의견 없음

제2017-3회 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사․의결 하였음.

2017년  04월  07일

위 원 장 :	택지사업본부	택지조성처장	김 소 겸	□
부위원장 :	택지사업본부	택지설계부장	이 광 윤	□
위 원 :	택지사업본부	토목기술부	김 익 성	□
위 원 :		택지계획부	김 주 완	□
위 원 :		기반시설사업부	노 병 철	□
위 원 :		택지계획부	최 칠 문	□
위 원 :	기획경영본부	계약심사부	곽 홍 준	□
위 원 :		재정관리부	장 한 수	□
위 원 :		예산자금부	손 명 호	□

제 2017-4회 위원회 서면 결의서

의  제 : 내곡지구 도로시설물(도로) 중성화방지

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 내곡지구 도로시설물(교량) 중성화방지에 대하여 설계변경 타당성 및 비목별 단가적용 적정성 등 원안가결

구 분	성명	찬 성	반 대	비 고
위 원 장	김 소 겸
부위원장	이 광 윤
위 원	김 익 성
위 원	김 주 완
위 원	노 병 철
위 원	최 칠 문
위 원	곽 홍 준
위 원	장 한 수
위 원	손 명 호

2017년  04월  07일

위  원  장           김  소  겸    □