문서번호	교통운영과-7456
결재일자	2017.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		신호시설팀장	교통운영과장
이귀섭		구봉서	04/17 강진동
협조

	마포, 양화대교 보행신호등 설치공사 감리용역 준공기한 연기 검토보고

2017. 4.

교통운영과

(신호시설팀)

마포, 양화대교 보행신호등 설치공사 감리용역

준공기한 연기 검토보고

마포, 양화대교 보행신호등 설치공사 감리용역의 준공기한을 공사   준공기한 으로 연기하고자 아래와 같이 보고드림

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 마포, 양화대교 보행신호등 설치공사 감리용역

❍ 용역금액 : 금21,054,000원

❍ 용역기간 : 2016.12.26.~2017.02.23.

❍ 계 약 자 : ㈜건영이앤씨 (대표 박준범)

□ 보고내용

❍ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비고
계약기간	2016.12.26.~2017.04.30.	2016.12.26.~2017.10.31.

❍ 준공기한 연기 사유

- 마포, 양화대교 보행신호등 설치공사 감리용역을 보행신호등 설치공사의 준공기한 으로 연기하고자 함

□ 향후 추진일정

❍ 재무과로 준공기한 연기 의뢰

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

3. 공사 계약서 1부. 끝.