문서번호	급수운영과-8195
결재일자	2017.5.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
고원석		05/02 유용일
협 조

설계변경(1차) 심의위원회 의견서

『2016년 2차 청담동외 6개동 상수도공사』

2017. 05.

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 의견서(1차)

심의 의원회 의견

○  공 사 명  :  2016년 2차 청담동외 6개동 상수도공사(단가계약)

○ 심의일시 : 2017. 05. 02(화) 14:00

○ 심의장소 : 강남수도사업소 4층(급수운영과)

○ 심의의견 : 설계변경(1차) 심의 의견을 아래와 같이 제시함

구 분	직 위	심의내용 및 결과		성 명	비고
		심의항목	심의결과
위원장	급수운영과장	물량변동 적정성	적정함	유용일
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	급수운영과 시설6급	물량변동 적정성	적정함	이승우
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	시설관리과 시설6급	물량변동 적정성	타당함	윤복철
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	급수운영과 시설7급	물량변동 적정성	적정함	박 홍
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	시설관리과 시설7급	물량변동 적정성	적정함	강희창
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성

신청부서명	급수운영과
작 성 자	고원석
제출년월일	2017. 05. 02.

설계변경(1차) 요약 보고

「2016년 2차 청담동외 6개동 상수도공사(단가계약)」에 대하여 신규공정 및 물량변경 사항이 발생하여 아래와 같이 심의내용 보고

□ 공 사 명 : 2016년 2차 청담동외 6개동 상수도공사(단가계약)

❍ 공사개요 : D=13~300mm, L=784m

❍ 계약기간 : 2017.01.24. ~ 2017.06.30.

❍ 도 급 비 : *************

❍ 도 급 자 : ************

□ 변경사유

❍ 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 물량감소 : 기계다짐(보통)(램머80kg,야간) 공정 외 99개 공정

- 물량증가 : 콘크리트깨기(소형브레이커) 공정 외 63개 공정

❍ 신규공정에 따른 계약물량 조정

- 신규공정 : 주철관 철거공(80mm) 외 7개 공정

□ 설계변경 내역                                       (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증ㆍ감
도 급 비	***********	***********	******
공 급 가 액	***********	***********	******
부가 가치세	**********	**********	******

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.