투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	하도급 변경사항 알림(917공구)

1. 도시철도토목부-2554호(2012.04.04) 및 선진철갑 2014-180호(2014.03.26)와 관련입니다.

2. 지하철9호선 2단계 917공구 건설공사와 관련 하도급계약이 변경되어 알려드리오니 관련업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울지하철9호선2단계 917공구 건설공사

나. 수 급 인 : GS건설(주)  임병용

다. 변경사유 : 공사기간 연장(2014.02.01.→2014.12.31.)

라. 하도급 변경현황

(단위 : 천원)

구 분	하수급자	하도급해당금액		하도급액		하도급율(%)		비고
		당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
구조물방수공사	(주)이시비건업 정인보	1,633,422	1,633,422	1,302,643	1,302,643	79.75	79.75

※ 공사기간 연장에 따른 변경계약으로 하도급액 및 하도급율 변동없음

첨부  하도급계약 통보서 각  1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	황왕연		토목1과장	代황왕연		도시철도토목부장	04/03 이은상
협조자
시행	도시철도토목부-3824	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 서울시청남산별관4층	/
전화	02)772-7210	/전송	02)772-7306	/	hwy1234@seoul.go.kr	/	대시민공개