“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 변경계약 의뢰

1. 물재생계획과-6299(17.5.8)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 「2016년 하수도사업관리용역」에 대하여 아래와 같이 용역 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 변경계약 내용

용역명		2016년 하수도사업관리용역 (계획 및 설계분야)	2016년 하수도사업관리용역 (조사 및 유지관리분야)
용역내용		변경없음	변경없음
계약금액		370,000,000원	553,000,000원
용역기간	당초	2016. 5.17~2017.5.17	2016.5.12.~2017.5.16
	변경	2016. 5.17~2017.6.30	2016.5.12.~2017.6.30

나. 연기사유

- ‘17년 하수사업관리용역의 통합발주로 인한 실착수일이 6월이후 예정으로 하수도사업관리용역의 업무연속성(예산편성검토, 우기전 공사장 점검, 긴급상황업무처리 등) 유지를 위해 준공기한 연기

붙 임 : 1. 용역 준공기한 연기 검토 보고 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부 끝.

	물재생계획과장
전문관	배원영		하수관리팀장	최병출		물재생계획과장	05/08 하상문
협조자	배수설계팀장	심형보
시행	물재생계획과-6310	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3790	/전송	02-2133-1042	/	bwy600@seoul.go.kr	/	대시민공개