투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	공사변경계약 체결 통보(하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사(3차))

1. 도시철도토목부-5648(2017.4.28.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 변경계약 의뢰한 공사건에 대하여 다음과 같이 변경계약체결되었음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

******************************하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사(3차)

******************************(주)쌍용건설 (대표 김석준)

**************************

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
3차	계약기간	**********************	****
	계약금액	***************	****	******

****************************************

마. 변경 사유 : 인접공구(2공구)의 시공지연 및 유관기관의 협의지연에 따른 내역조정

첨부 : 공사변경계약서 1부.  끝.

	건설총괄부장
주무관	이강준		경리과장	최정수		건설총괄부장	05/11 이상국
협조자
시행	건설총괄부-10458	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2362	/전송	02)3708-2365	/	lgj1011@seoul.go.kr	/	부분공개(5)