문서번호	방재시설부-8055
결재일자	2017.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		신용우	05/12 남궁용
협조
	치수시설과장		조성만

- 도림천상류 관악산저류조 설치공사 -

서울대 정문 앞 저류조 교통섬 조경식재 실정보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 도림천상류 관악산저류조 설치공사 -

서울대 정문 앞 저류조 교통섬 조경식재 실정보고 검토보고

「도림천 상류 관악산저류조 설치공사」중 서울대 정문 앞 저류조 교통섬    조경식재 관련하여 관악구청 검토의견 사항을 공사에 반영한 실정보고임.

※ 관련공문 :서울대 정문 앞 저류조 교통섬 조경식재 관련 실정보고(도림천(감)2017-92/2017.04.20.)

공사개요

○ 공 사 명 : 도림천상류 관악산저류조 설치공사

○ 사업기간 : 2012.06.13. ~ 2017.5.31

○ 규    모 : 서울대학교 정문앞 저류조 40,000톤

노천강당 저류조 20,000톤, 공대폭포 저류조 5,000톤

○ 공 사 비 : 41,424백만원(조경 41,187백만원)

○ 시 공 사 : ㈜서우건영/ 남광토건㈜

○ 감 리 사 : ㈜신명건설기술공사

감리단 실정내용 및 검토의견

○ 실정보고 내용

구 분	수종 및 시설명	규격	변 경 전	변 경 후	증감	비고
식재공	느티나무	H5.0×R30	**	*	**	적정
	목련	H4.0×R20	**	*	**	〃
	소나무(조형)	H5.0×W2.5×R35	**	*	**	〃
		H5.0×W3.0×R40	**	*	**	〃
	청단풍	R25	**	*	**	〃
	홍단풍	R15	**	*	**	〃
	눈주목 등	H0.3~H1.0	******	*	*******	〃
	사사	10㎝	******	*	*******	〃
	잔디	평떼	******	******	*******	〃

구 분	수종 및 시설명	규격	변 경 전	변 경 후	증감	비고
식재공	장송	H9.0×R40	*	***	****	적정
		H9.0×R35	*	***	****	〃
	식물매트	야생화	*	****	*****	〃
	화살나무	H0.8×W0.3	*	****	*****	〃
	서양측백	H2.0~4.0	*	***	****	〃
	글라스가든		*	**	***	〃
포장공	화강석블럭	T60	***	*	****	〃
	경계석	150×150×1,000	***	*	****	〃

○ 감리단 의견(관악구청 업무협의 결과 사항 검토)

- 운전자 시야 확보위해 전반적으로 개방감 있게 조성

→ 운전자 시야 확보위해 진출입로 교차로 부근 소나무 식재              배제하여 안전사고 대비 함.

- 잔디광장 개념을 도입하고, 경관성 부여 위해 소나무(장송) 및         Grass garden으로 포인트 식재

→ 경관성 고려 장송 및  Grass garden 반영

- 소나무 하부 식재는 경관 조화 위해 야생화 매트 계획

→ 야생화 매트 반영

- 소나무 식재지는 배수가 양호하도록 별도 배수시설 설치

→ 서울대 정문 앞 도로 구배(7%)가 경사져 있으며 조경토가            배수성이 좋아 별도의 배수시설은 설치하지 않는 것으로 계획

- 발주처와 관악구청 업무협의 결과 사항에 대하여 최대한 반영         하여 변경하였으므로 적정하다 판단됨.

개략공사비 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증감
직접공사비	***********	***********	*************
제경비(부가세포함)	**********	**********	***********
도급비	***********	***********	************
총공사비	***********	***********	************

검토결과

○ 서울대학교 정문앞 교통섬 조경식재 계획에 대하여 인수기관인 관악구청(공원녹지과)과 업무 협의하고 요구사항에 대하여 공사에 반영하여 가로경관 향상 및 잔디광장 개념을 도입하고 특색있는 글라스 가든 형태의 조경계획으로 가로녹지 경관을 향상하고자 함.

※ 관악구청 조경관련 협의 회신(공원녹지과-3231/2017.2.15.)

○ 우선 시공토록 실정보고 사항을 승인처리 하며 추후 설계변경 소위원회를 개최하여 심의를 득한 후 설계변경 시 정산․반영할 수 있도록 감리단에 통보하고자 함.

붙임 : 실정보고 검토보고 1부. 끝.