문서번호	현장민원과-7321
결재일자	2017.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	북부수도사업소장
김병용		한병주	05/15 代정의석
협조

만기계량기 교체실적 분석결과 보고

2017. 5.

북부수도사업소

(현장민원과)

만기계량기 교체 중간평가 보고

2017. 4월까지 만기계량기 및 역류방지밸브 설치실적에 대한 분석 결과를 보고드림.

현장민원과-4368(2017.3.21.)관련

1		2017년 교체(설치)목표

□ 만기계량기 : 33,100개

○ 월간 교체목표

계	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
33,100	960	3,570	3,570	3,570	3,570	3,580	3,570	3,570	3,570	3,570

□ 역류방지밸브 : 7,000개

2		추진현황

□ 추진실적

○ 만기계량기 : 7,918개(4월까지 교체목표 8,100개 대비 97.9%)

- 월별 교체실적

구분	계	2월	3월	4월
목표	8,100	960	3,570	3,570
실적	7,918	825	3,111	3,982
추진률(%)	97.7	85.94	87.14	111.54

○ 역류방지밸브 : 20개(금년 교체목표 7,000개 대비 0.29%)

□ 추진사항

○ 만기계량기 교체

- 2017년도 만기교체 물량 증가 및 교체인력 감소(2명)에 따라

만기계량기 교체업무 조기 투입(당초 3월 → 2.20일)

- 3월까지 실적 미흡에 따라 대책 마련 요청(공문)

- 4월 이후 발견된 동파(외갑)계량기를 현장민원과 직원이 교체

하도록 하여 만기계량기 교체에 집중할수 있도록 조치

- 4월 이후 시설관리공단 교체반장 현장 투입

○ 역류방지밸브 설치

- 3월까지 실적 미흡에 따라 대책 마련 요청(공문)

- 4월 이후 설치실적 저조에 따라 공단에 대책마련 구두 요청

3		추진실적 분석

□ 만기계량기 교체

○ 4월말 현재 2017년도 교체목표(33,100)대비 23.9%를

교체하여 월별목표 달성 미달

- 시설관리공단의 교체인력 감소(2명)에 따라 2월 20일부터 만기계량기

교체작업에 투입하였으나, 2~3월의 경우 목표대비 85, 87%로 부진

○ 4월 교체반장 작업 투입으로 월 목표 초과 달성(111%)

□ 역류방지밸브 설치

○ 3월까지 설치실적이 없어 공단에 대책마련 요청 및 회의를

통해 수차례 요청하였으나, 현장 직원들이 설치 기피

- 시설관리공단의 교체 직원들이 역류방지밸브 설치에 대한 인식 부족 등

으로 설치 기피

○ 4월에는 공단 현장직원 8명중 2명만 설치하여 실적이 극히

저조함(0.29%)

4		향후계획

○ 만기계량기

- 월별 목표를 달성토록 공단(동부수도관리소)에 대책 마련 및

추진 요청

- 5월에도 추진실적이 미흡할 경우에는

▷ 공단 본부에 교체인력 충원 등 대책 마련을 요청하고

▷ 우리본부에 서울시 차원에서 공단에 요청 및 협약사항 미

이행시 조치할 사항 등을 협약서 등에 추가토록 건의

○ 역류방지밸브

- 만기 교체시 역류방지밸브 설치 가능 건물에 전수 설치토록

공단(동부수도관리소)에 요청

※ 역류방지밸브 가능건물 명단은 공단에 기 통보.  끝.