문서번호	시설보수과-4340
결재일자	2017.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭	김종성	신동헌	05/17 한동근
협 조

2017년 도로시설물 세척용역 기성(1회) 검토보고

2017. 5

서부도로사업소

(시설보수과)

2017년 도로시설물 세척용역 기성(1회) 검토보고

우리 사업소에서 시행하고 있는 ‘2016년 도로시설물 세척용역’과 관련하여 용역사로부터 기성부분 검사원(제1회)이 접수되어 검토 보고함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 도로시설물 세척용역-서부

○ 용역기간 : 2017. 3. 2 ~ 12. 31

○ 계약금액 : 944,912천원

○ 용 역 사 : 향우산업 주식회사 (대표 변호인)

□ 주요 추진경위

○ 2017. 3.  2  : 용역착수

○ 2017. 3. 10 ~ 3. 19 : 봄맞이 시설물 세척작업 (1차작업)

○ 2017. 4.  6 ~ 4. 12 : 터널 5개소 세척작업 (2차작업)

○ 2017. 5. 11 : 용역 기성부분 검사원(제1회) 제출

○ 2017. 5. 16 : 기성부분 검사원(제1회) 수정 제출

□ 기성(제1회) 검토

○ 기성금액 : 409,887천원 (43.4%)

○ 기성실적 : 총2회 도로시설물 세척작업 시행

구 분	벽체타일	콘크리트	보도바닥	난간	방음판	등기구
계약물량	160,998㎡	264,001㎡	19,101㎡	15,022㎡	39,920㎡	11,962개
기성물량	74,108㎡	134,148㎡	6,367㎡	4,652㎡	13,328㎡	5,981개
기성율(%)	46.0%	50.8%	33.3%	30.9%	33.3%	50.0%

○ 주요 공종별 세척 사진

<터널 벽체타일 세척>	<지하차도 벽체타일 세척>	<등기구 세척>

□ 검토의견

○ 상기 보고내용과 같이 2017년 도로시설물 세척용역 계약물량에 대한 1,2차 작업지시에 의거 기간 내 세척작업 수행을 완료하고 전, 중, 후 사진을 첨부한 완료보고서를 제출하였으며,

○ 용역업체로부터 접수된 기성부분 검사원(제1회)의 작업물량 및 기성금액 등을 확인한 결과 작업지시에 의한 시설물 공종별 세척물량이 적정하므로 기성부분 준공 처리코자 함.

※ 세척용역 예산 집행 내역

(단위:원)

구 분	계약금액	전회까지 기성액	금회 기성액	기성잔액
용역비	944,912,040	-	409,887,000	535,025,040

□ 향후계획

○ 2017. 5. 17 : 기성검사(감독)조서 제출(→관리단속과)

○ 2017. 5~12월 : 년중 세척작업 지속 시행

붙임 : 1. 용역 기성부분 검사원(1회) 1부.

2. 기성내역서(1회) 1부.

3. 기성사진대지(1회) 1부.  끝.