2017년 성산대교 (남․북단) 예산사용 계획

□ 예산 사용 지연사유

- 가설교량 설계보완

- 망원수영장 저촉 지장물 처리방안 등 협의

□ 월별 예산사용 계획(2017.05~2017.12)

구 분	공종명	공사내용(세부사항)		예산사용 계획(백만원)
2017.00	실시설계	- 실시설계 용역비 집행		37(기 지출액)
2017.06	조경공	- 지상수목 이식(215주)		483
	부대공	- 지반조사
	관급자재	- 6월 말까지 지출되지 않을 수 있음		2,000
	선금수령	- 혜영본사와 협의 필요		1,000
	감리비	- 감리기성		100
6월 금액 사용금액			시설비	3,520
			감리비	100
소 계				3,620
2017.07	부대공, 가교공	- 지장물이설 등, 가교공 가교강재제작		84
2017.08	가교공	- 본교 하부공 Pile시공, 현장세우기 등		303
	망원주차장 점용	- 망원주차장 점용에 따른 사업배상액		100
2017.09	가교공, 가도 및 가설벤트	- 본교, 램프교 하부공 Pile시공, 현장세우기 - 가도 및 접속슬래브, 교통우회용 가도설치		838
	감리비	- 감리기성		200
2017.10	가교공, 가도 및 가설벤트	- 본교, 램프교 철골가공조립, 복공판설치 - 램프교 철골가공조립 복공판설치 - 가도 및 접속슬래브, 교통우회용 가도설치		2,369
	성산대교 (남단)	- 착수 후 공사준비 및 관급자재비 등		4,045
2017.11	가교공, 가도 및 가설벤트	- 본교 철골가공조립, 복공판 설치등 가설벤트 설치		2,575
2017.12	바닥판철거공	- 낙하물방지 시설 설치 - 접속교 및 본교 상부슬라브 바닥판 철거(상행)		616
	감리비	- 감리기성		288
성산대교 남․북단 예산사용 계			시설비 소계	14,450
			감리비 소계	588
총 사용금액 합계				15,038백만원

(단위:백만원)

	배정액	지출가능액
감리비	995	588
시설비	14,450	14,450
합계		15,038