투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강남순환도시고속도로 4공구 건설공사 건설사업관리단장 귀하
(경유)
제목	교통안전시설 설치 원인자공사 변경승인 알림 (강남순환도시고속도로 4공구(기아대표 앞) 현장주변 교통안전시설 설치공사)

1. 서영강남 17-143(2017305029)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 교통안전시설 설치 원인자공사 공사기간 변경요청 사항에 대하여 아래와 같이 변경승인 되었음을 알려드리며, 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바라며

3. 준공시 구체적인 변경사유(경찰청 규제심의 결과 등) 및 변경설계도서 등을 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 4공구(기아대표 앞) 현장주변 교통안전시설 설치공사

나. 변경사항(공사관리번호 : 신호 2016-0201-027)

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2016.5.17.~ 2016.10.30	2016.5.17.~ 2017.6.30	교통신호기 설치 - 1식

다. 변경사유 : 다목적(신호, 과속단속)카메라 등 추가설치.

따로붙임 : 관련공문 사본 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	06/01 유병기
협조자
시행	설비부-9147	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개