투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	교통안전시설 설치 원인자공사 변경승인 알림 (강남순환도시고속도로 4공구(기아대표 앞) 현장주변 교통안전시설 설치공사)

1. 관련근거

- 도시기반시설본부 설비부-9048(2017.5.31)호와 관련임.

2. 위 호와 관련 교통안전시설 설치 원인자공사 공사기간 변경요청 사항에 대하여 아래와 같이 변경승인 함을 알려드리며, 추후 변경사항이 있을 경우 사전에 변경승인 후 공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 4공구(기아대표 앞) 현장주변 교통안전시설 설치공사

나. 변경사항(공사관리번호 : 신호 2016-0201-027)

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2016.5.17.~ 2016.10.30	2016.5.17.~ 2017.6.30	교통신호기 설치 - 1식

다. 변경사유 : 다목적(신호, 과속단속)카메라 등 추가설치

※  준공시 구체적인 변경사유(경찰청 규제심의 결과 등) 및 변경설계도서 등을 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김용문		기전과장	06/01 임태수
협조자
시행	기전과-2872	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5432	/전송	02)832-5470	/		/	대시민공개