등록번호

푸른도시과-10642

주무관

조경팀장

푸른도시과장

안전건설교통국장

등록일자

2017.6.5.

이순호

김종철

양종수

06/05

이경우

결재일자

2017.6.5.

공개구분

부분공개(5)

협  조

「이대 특화거리 가로수 정비사업」

준공기한 연기 검토보고

서 대 문 구

푸른도시과

「이대 특화거리 가로수 정비사업」

준공기한 연기 검토보고

현재 진행중인 「이대 특화거리 가로수 정비사업」 과 관련,아래와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 이대정문 ~ 이대역(2호선)

○ 사업기간 : 2017. 2. 14. ~ 6. 13.

○ 공 사 비 : 금97,424,320원

- 도 급 비 : 금79,322,400원

- 관 급 비 : 금18,101,920원

○ 공사내용 : 은행나무 암나무 가로수 교체, 가지치기 등

- 은행나무 암나무 제거 18주, 수나무 식재 18주

- 가로수 보호판 설치 43조, 수나무 가지치기 등

○ 도 급 자 : (유)더존테크 대표 김성례

□ 변경내용

○ 공사기한 연기

- 당  초 : 2017. 2. 14. ~  6. 13.

- 변  경 : 2017. 2. 14. ~ 11. 30.

□ 변경사유(연기)

○ 이대 특화거리 개선을 위해 추진중인 사업으로 건설관리과, 토목과, 안전치수과       등 관련부서 및 주민들과의 지속적인 대화와 소통에 시일이 소요되며,

○ 거리가게 이전, 보도블럭 및 보도선형변경, 하수도 개량, 가로수 정비 등 다양한 공종의 유기적이고 원활한 추진을 위해 준공기한 연기

□ 연기사유 귀책소재 : 서대문구청장

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 보고자 의견

○ 위와같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 예정공정표 1부.  끝.