	예산서 P.
신월1배수분구 하수관로 종합정비

1		기본현황

□ 사업개요
사업기간	□연례반복, ☑2015.06 ~ 2019.12
사업위치	강서구 화곡동, 우장산동 일대
총사업비	총 28,469,000천원		[국비]	[시비]28,469,000천원	(보조율) 0 %	[구비]
사업내용
	○	하수관로 종합정비
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	강서구청

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부
신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	☑	□	□	□	□	□	☑	□
		`13.10.8 조건부
경상	투자
□	☑

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	김태헌 2133-3810	정재윤 2133-3795

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2015년 본예산	2017본예산 (A)		2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
								(B-A)*100/A
계			(x-) 5,000,000	(x-) 4,500,000		(x-) 3,500,000	(x-) △1,000,000	(x-) △22
시설비			(x-) 4,680,000	(x-) 4,070,000		(x-) 3,111,000	(x-) △959,000	(x-) △23
감리비			(x-) 320,000	(x-) 430,000		(x-) 389,000	(x-) △41,000	(x-) △9

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거 (전년대비하여 과목별 작성)

과목구분	2017년 본예산
계	3,500,000천원
시설비	하수관로 정비 3,113,000*1= 3,111,000천원
감리비	389,000천원

과목구분	2018년 예산(안)
시설비	시설비 : 3,111,000천원 하수관로부설 = 2,773,376천원 - D=300mm, L= 77m x 194천원/m = 14,938천원 - D=450mm, L= 550m x 1,159천원/m = 637,450천원 - D=500mm, L= 80m x 1,232천원/m = 98,560천원 - D=600mm, L= 500m x 1,359천원/m = 679,500천원 - D=700mm, L= 280m x 1,894천원/m = 530,320천원 - D=800mm, L= 173m x 1,915천원/m = 331,295천원 - D=900mm, L= 19m x 1,937천원/m = 36,803천원 - 비굴착보수 L= 898m x 495천원/m = 444,510천원 이전비 : 158,400천원 - 도시가스 : 20개소 x 5,000천원 = 100,000천원 - 상수도 : 200m x 292천원 = 58,400천원 폐기물처리비 :179,308천원 - 7796톤 X 23천원 = 179,308천원
감리비	감리비 : 389,000천원 - 10개월 : 1식 x 389,000천원 = 389,000천원

과목구분	증 감 사 유
시설비	계속사업

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)                        (단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 28,469	(x-) 7,394	(x-) 4,500	(x-) 3,500	(x-) 13,075
시설비	(x-) 26,246	(x-) 7,140	(x-) 4,070	(x-) 3.111	(x-) 11,925
감리비	(x-) 2,223	(x-) 254	(x-) 430	(x-) 389	(x-) 1,150

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	배수체계개선, 통수능확보 등 기능회복으로 도시침수 예방
○	노후, 불량관거 개보수 등으로 시민안전 및 시설물 내구연한 유지

□ 사업근거
○	법령상 근거
-		하수도법 제3조 (국가 및 지방자치 단체의 책무)
○	기타 근거(방침, 지침 등)
-		‘09. 6. : 서울특별시 하수도정비 기본계획 (변경)

□ 사업내용
○	위 치 : 강서구 화곡동, 우장산동 일대(양천구 포함)
○	규 모 : 하수관로 정비: ▣ D=450~1,350mm, L=17km
○	사업기간 : 2015. 06 ~ 2019. 12.
○	사업내용 : 통수능력부족 및 노후불량 하수관로 정비
○	총사업비 : 27,469백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)(2018년)
○	위 치 : 강서구 화곡동 일대
○	규 모 : D=300~900mm, L=2.577km (원형관로 비굴착 공사 D=300~900mm, L=0.5km 포함)
○	사업내용 : 통수능력부족 및 노후불량 하수관로 정비
○	소요예산(안) : 3,500백만원(시설비 3,111백만원)

□ 추진경위
○	`98.05 : 서울시 하수관거 종합정비계획에 따라 시행한 “하수관거조사 및 정비기본설계 (안양천 좌안)”
○	`11.03~13.02. : 실시설계용역 실시
○	`15.06~15.12. : 공사시행완료 (1차)
○	`16.03~16.11. : 공사시행 중 (2차)

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)
○	전체 사업계획에 따라 노후 및 불량 하수관로를 적기에 개량하여 도로함몰로 인한 안전사고 예방 및 통수능 확보 등 기능회복으로 도시침수 예방
○	하수누수 및 불명수 유입을 차단하여 토양오염 방지 및 처리장의 효율증대

□ 사업추진절차
○	집행절차
-		예산편성⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
○	계약체결
-		입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒계약체결

□ 2018년도 추진일정 (단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,500,000
공사발주	2018.01~2018.02		차수 계약
공사시행	2018.03~2018.11		공사착공 및 시행
차수준공	2018.12	3,500,000	공사준공

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

2015년도
	○	하수관거 정비 시행(D300~1,500mm, L=2,759m)
2016년도
	○	하수관거 정비 시행(D300~1,500mm, L=3,250m)
2017년도
	○	하수관거 정비 시행 중(D300~900mm, L=3,700m)

□   향후 기대효과

○	배수체계 개선, 통수능 확보 등 기능회복으로 도시침수 예방
○	노후·불량 관로 개보수 등으로 시민안전 및 시설물 내구 연한 유지
○	하수누수 및 불명수 유입을 차단하여 토양오염 방지 및 처리장의 효율증대

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014
2015	(x-) 3,699,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,699,000	(x-) 3,095,966	(x-) 0	(x-) 603,034
2016	(x-) 5,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 5,000,000	(x-) 4,298,490	(x-) 0	(x-) 701,510

참 고 자 료

▢ 위치도 및 조감도(현황도)

위  치  도

현  황  도