상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	뚝도정수센터 성능확인 시운전 일정 변경에 따른 급수운영 협조 요청

1. 시설과 – 5508호(2017. 6. 16.)와 관련입니다.

2.「뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사」와 관련하여 1계열(구3계열) 공사완료에 따른 성능확인 시운전 일정 중 아래와 같이 변경사항이 발생하여 알려드리오니 관련부서에서는 원활한 시운전 및 통수 추진을 위하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 시운전 일정 변경 사항.

- 당초 : 2017.6.15.(목) 10:00~6.19(월)

구의→대현산 송수펌프 가동 중단하고 뚝도 1계열 시설용량(35만톤/일) 생산,         부족부분은 뚝도 2계열 가동하여 추가 생산

- 변경 : 2017.6.16.(금)~6.19(월) 10:00

뚝도 1계열 시설용량(35만톤/일) 생산하고, 부족부분은 구의→대현산            대체급수 시행

- 사유 : 뚝도 2계열 침전지 보수작업으로 인한 생산 불가

※ 뚝도 2계열 정상생산 가능 시 ‘17.6.19(월) 10:00 구의→대현산 송수펌프 가동 중단 예정임.

6.20(화)~6.22(목) 3일간 시운전 테스트는 당초 계획대로 시행 예정임.

따로붙임 :  급수운영 협조 요청 공문 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,기전설비과장,시설과장,동부수도사업소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,수질과장
주무관	박종혁		배수과장	代신근호		급수부장	06/16 이규상
협조자	주무관	이연창
시행	배수과-4975	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개