문서번호	설비부-10507
결재일자	2017.6.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
박병환		김은덕	06/26 권오식
협조

『서울역 주변 교차로 개선 전기공사』

준공기한 연장 검토 보고

2017. 6.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『서울역 주변 교차로 개선 전기공사』

준공기한 연장 검토 보고

「서울역 주변 교차로 개선 전기공사」관련, 책임감리로부터 준공기한 연장 요청에 따른 검토 보고임.

관련근거

□ TR-감-0605(‘17.06.23): 서울역주변 교차로 개선 전기공사 준공기한 연장 검토보고

사업개요

□ 위   치: 중구 남대문로 5가 84-15외

□  규  모

- 서울역주변 교차로 외 10개소 교통신호등 공사 1식

- 서부역주변 교차로 외 10개소 교통신호등 공사 1식

- 시 공 사:*******

- 감 리 사: *****

보고 내용

□ 준공기한 변경 현황                                        [단위:원]

구 분		당 초	변 경	비고
전기 공사	계약금액	***********	변경사항없음	*** ***
	공사기간	*********************	**********************
감리 용역	계약금액	**********	변경사항없음
	용역기간	*********************	**********************

□ 연장사유

- 교통신호기 추가 공사에 따른 공기 부족으로 연장

검토결과 조치의견

□ 민원에 따른 교통신호기 추가공사 발생으로 공사 준공기한을 연장하여 공정관리에 만전을 기 하고자 함.

□ 건설총괄부에 공사 준공기한(감리 용역 포함)을 연장 의뢰 하고자 함.

붙임  1. 관련문서 1부. 끝.