투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	시립노원청소년직업체험센터 신축공사 설계용역 계약변경(용역기간 연장) 의뢰

우리본부가 시행중인『시립노원청소년직업체험센터 신축공사 설계용역』과 관련하여 다음과 같이 계약변경(용역기간 연장)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 시립노원청소년직업체험센터 신축공사 설계용역

나. 계 약 자 : ㈜엠파건축사사무소

다. 요청내용 : 용역기간 연장(62일)

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	‘15.12.31 ~ ’17.6.30	‘15.12.31 ~ ’17.8.31	62일 연장
계약금액	362,900,000원	362,900,000원	변경없음

라. 연장사유 : 설계경제성심사(VE) 진행 및 결과 반영기간 등 추가적인 설계용역기간 필요

붙임 : 설계용역 기간연장 검토 보고서 1부.  끝.

	건축부장
★주무관	송현정		건축관리과장	곽동호		건축부장	06/26 김진용
협조자	경리과장	최정수
시행	건축부-10917	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)