상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	공사 계약 변경 의뢰 (문화비축기지 카페테리아 주방설비 공사)

1. 공원녹지정책과-9499호(2017. 6. 2.) 관련입니다.

2. 우리 과에서 추진중인 ‘문화비축기지 카페테리아 주방설비 공사’의 계약기간을 아래와 같이 연장하고자 하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 문화비축기지 카페테리아 주방설비 공사

나. 계약업체 : 주식회사 건일씨엔에스

다. 계약금액 : 금14,000,000원(금일천사백만원)

라. 준공기한 변경

- 당  초 : ‘17. 6. 14. ~‘17. 7. 3.

- 변  경 : ‘17. 6. 14. ~‘17. 7. 31.

붙임: 1. 준공기한 연장계획 보고 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	공원녹지정책과장
주무관	이은진		문화비축기지운영TF팀장	이광준		공원녹지정책과장	06/27 최윤종
협조자
시행	공원녹지정책과-10965	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21, 9층	/
전화		/전송	2133-1080	/		/	부분공개(5)