투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	실정보고 승인(조건부) 통보 및 설계변경소위원회 심의자료 제출 지시(잠원2 빗물펌프장 전기공사)

1.업무지시현장 : 잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사 주식회사 범한엔지니어링 종합건축사 사무소, 잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사 (주)신명건설기술공사, 잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사 등전전기(주)

2.작 성 일 자 : 2017-06-29 08:06:40

3.지 시 내 용

1) 잠원2감 2017-228(2017.06.23)호와 관련입니다.

2) 위호와 관련, 『잠원2 빗물펌프장 신설 전기공사』 시행중 “강남역 역경사관로 이설 전기분야“ 설계변경 실정보고에 대하여 검토결과 건설사업관리기술자의 의견이 적정한 것으로 판단되어, 우리부 설계변경소위원회 심의 후 결과를 반영하는 조건으로 승인하니 시행에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 설계변경소위원회 심의자료를 작성하여 제출하시기 바랍니다.  끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							곽용길			열빛총괄과장					06/29 유병기
협조자
시행			설비부-10854									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-8659					/	yong9345@seoul.go.kr												/	대시민공개