투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(서울대공원 공영 주차장 시설개선공사)

1. 현재 진행중인『서울대공원 공영주차장 시설개선공사』에 대한 설계변경을   아래와 같이 시행코자 합니다.

□ 설계변경

가. 공 사 명 : 서울대공원 공영주차장 시설개선공사

나. 사 업 비 : 금250,991,040원

(도급비 : 211,190,200원, 관급비 39,800,840원)

다. 공사기간 : 2017. 04. 19. ~ 2017. 08. 30.

라. 계약업체 : 스타건설(주) 대 표 박 나 현

마. 설계변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증 · 감)
총 공 사 비	250,991,040	275,803,230	증)24,812,190
도 급 비	211,190,200	154,297,000	감)56,893,200
관 급 비	39,800,840	121,506,230	증)81,705,390

바. 사    유

- 도로포장 방법 변경에 따른 변경

사. 예산과목

- 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보존, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비, 주차장 바닥균열보수

붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부

2. 변경내역서 1부. 끝.

주무관	손영민		주무관	한상길		시설과장	代이춘한		관리부장	06/30 김명용
협조자	총무과장	이행용
시행	시설과-3811	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7441	/전송	507-7230	/	sonym6974@seoul.go.kr	/	부분공개(5)