투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	장충체육관 리모델링공사 계약변경(총차 및 1차) 의뢰

1. 도시기반시설본부 건축부-4393호(2014.04.09)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인「장충체육관 리모델링공사」에 대하여 아래와 같이 계약변경(총차 및 1차) 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 장충체육관 리모델링공사

나. 대지위치 : 중구 장충동2가 200-102

다. 건축규모 : 지하2층/지상3층, 연면적 11,429㎡, 문화 및 집회시설(체육관)

라. 공사기간 : 총차-’12.05.30~‘14.08.31 (1차 - ’12.05.30~’14.05.31)

마. 계약금액 : 총차-11,017,069천원 (1차–7,583,997천원)

바. 계 약 자 : 성지건설외 1개사

사. 계약변경 현황(총차 및 1차)

○ 변경사유 : 보조경기장 지붕변경(철골철근콘크리트조 → 철근콘크리트조) 등

○ 총차 및 1차 계약금액 변경내용                          (단위:원)

구 분	계약금액(당초)	계약금액(변경)	증 감	공사기간	비 고
총 차	10,952,235,000	11,017,069,000	64,834,000	‘12.05.30～’14.08.31	금액변경
1 차	7,519,163,000	7,583,997,000	64,834,000	‘12.05.30～’14.05.31	공 사 중
2차(장래분)	3,433,072,000	3,433,072,000	0	‘14.06.01~’14.08.31	장 래 분

※ 예산과목 : 조직)문화관광디자인본부 체육진흥과,   정책)시민체육 및 국제스포츠 진흥발전    단위)시민체육공간 확충,    세부)장충체육관 리모델링,    통계목)시설비 (401-01)

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 총차 및 1차 산출내역서(당초, 변경) 각 1부 및 기타사항 부기내용 .  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	신현성		의료시설과장	장윤수		건축부장	04/10 이병석
협조자
시행	건축부-4426	(		)	접수		(		)
우	100-130	서울 중구 서소문동 서소문빌딩 별관2동 2층 도시기반시설본부 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2618	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개